구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제기업과 지역경제담당 (담당자 홍주연, 6803)
	1-5
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2026. 1월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

단계시장 활성화 방안 마련

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 9월 ~ 2026. 6월

❍ 위       치: 산청군 신등면 단계시장 일원

❍ 총 소요예산: 2,641백만원(도 576, 군 2,065)

❍ 사 업 내 용: 단계시장 시설현대화사업(단계시장 장옥 정비공사), 주차장 조성사업, 스마트 경영 지원사업, 기타 활성화사업 등

□ 주요 추진사항

❍ 사업대상지 확정(경남도)	: 2022.  11월

❍ 상인회 협의 및 의견수렴	: 2023. 1. ~ 9월

❍ 주차장 조성사업, 장옥 신축공사 실시설계 용역	: 2023. 10월

❍ 주차장 조성사업, 장옥 신축공사 착공	: 2023. 12월

❍ 스마트 경영지원사업 추진	: 2024.  1월

❍ 장옥 철거 및 임시장옥 설치․운영	: 2024.  2월

❍ 장옥 신축공사 준공	: 2024.  6월

❍ 아케이드 설치사업 착공	: 2024.  6월

❍ 주차장 조성사업, 아케이드 설치사업 준공	: 2024.  9월

❍ 옥외간판(채널, 지주) 제작설치 착공	: 2024. 11월

❍ 옥외간판(채널, 지주) 제작설치 준공	: 2024. 12월

❍ 아케이드 측면 추가 설치공사	: 2025.  3월

❍ 단계시장 장옥 추가 창호 교체 공사	: 2025. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,641	2,641	2,641	2,492	-	596	1,896	-	2,492	-	596	1,896	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	2,641	-	25	2,576	20	10	10	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	576	-	-	576	-	-	-	-
군비	2,065	-	25	2,000	20	10	10	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
단계시장 활성화 방안마련	합계	2,492	2,257	-	-	2,452	618	-	1,619	40	20
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	596	528	-	-	596	23	-	505	-	-
	군비	1,896	1,729	-	-	1,856	595	-	1,114	40	20
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제기업과 지역경제담당 (담당자 최지은, 6803)
	1-5
추진실적 (기준일)	99% (정상추진) (2025. 6월 기준)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

단계시장 활성화 방안 마련

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 9월 ~ 2026. 6월

❍ 위       치: 산청군 신등면 단계시장 일원

❍ 총 소요예산: 2,641백만원(도 576, 군 2,065)

❍ 사 업 내 용: 단계시장 시설현대화사업(단계시장 장옥 정비공사), 주차장 조성사업, 스마트 경영 지원사업, 기타 활성화사업 등

□ 주요 추진사항

❍ 사업대상지 확정(경남도)	: 2022.  11월

❍ 상인회 협의 및 의견수렴	: 2023. 1. ~ 9월

❍ 주차장 조성사업, 장옥 신축공사 실시설계 용역	: 2023. 10월

❍ 주차장 조성사업, 장옥 신축공사 착공	: 2023. 12월

❍ 스마트 경영지원사업 추진	: 2024.  1월

❍ 장옥 철거 및 임시장옥 설치․운영	: 2024.  2월

❍ 장옥 신축공사 준공	: 2024.  6월

❍ 아케이드 설치사업 착공	: 2024.  6월

❍ 주차장 조성사업, 아케이드 설치사업 준공	: 2024.  9월

❍ 옥외간판(채널, 지주) 제작설치 착공	: 2024. 11월

❍ 옥외간판(채널, 지주) 제작설치 준공	: 2024. 12월

❍ 아케이드 측면 추가 설치공사	: 2025.  3월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,641	2,641	2,641	2,492	-	596	1,896	-	2,492	-	596	1,896	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	2,641	-	25	2,576	20	10	10	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	576	-	-	576	-	-	-	-
군비	2,065	-	25	2,000	20	10	10	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
단계시장 활성화 방안 마련	합계	2,492	2,257	-	-	2,452	618	-	1,619	40	20
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	596	528	-	-	596	23	-	505	-	-
	군비	1,896	1,729	-	-	1,856	595	-	1,114	40	20
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 단계시장 장옥 추가 창호 교체 공사	: 2025. 7월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제기업과 지역경제담당 (담당자 정재민, 6803)
	1-5
추진실적 (기준일)	90%(정상추진) (2025. 1월 기준)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

단계시장 활성화 방안 마련

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 9월 ~ 2026. 6월

❍ 위       치: 산청군 신등면 단계시장 일원

❍ 총 소요예산: 2,641백만원(도 576, 군 2,065)

❍ 사 업 내 용

- 단계시장 시설현대화사업(단계시장 장옥 정비공사), 주차장 조성사업,
스마트 경영 지원사업, 기타 활성화사업 등

□ 주요 추진사항

❍ 사업대상지 확정(경남도)	: 2022. 11월

❍ 상인회 협의 및 의겸수렴	: 2023.  1. ~ 9월

❍ 주차장 조성사업, 장옥 신축공사 실시설계 용역	: 2023. 10월

❍ 주차장 조성사업, 장옥 신축공사 착공	: 2023. 12월

❍ 스마트 경영지원사업 추진	: 2024.  1월

❍ 장옥 철거 및 임시장옥 설치․운영	: 2024.  2월

❍ 장옥 신축공사 준공	: 2024.  6월

❍ 아케이드 설치사업 착공	: 2024.  6월

❍ 주차장 조성사업, 아케이드 설치사업 준공	: 2024.  9월

❍ 옥외간판(채널, 지주) 제작설치 착공	: 2024. 11월

❍ 옥외간판(채널, 지주) 제작설치 준공	: 2024. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,641	2,641	2,641	2,452	-	596	1,856	-	2,452	-	596	1,856	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	2,641	-	25	2,576	20	10	10	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	576	-	-	576	-	-	-	-
군비	2,065	-	25	2,000	20	10	10	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
단계시장 활성화 방안 마련	합계	2,452	2,237	-	-	2,452	618	-	1,619	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	596	528	-	-	596	23	-	505	-	-
	군비	1,856	1,709	-	-	1,856	595	-	1,114	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 아케이드 추가 보강공사	: 2025. 3월

❍ CCTV 설치 사업 시행	: 2025. 4월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제교통과 지역경제담당 (담당자 이태연, 6803)
	1-5
추진실적 (기준일)	70%(정상추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

단계시장 활성화 방안 마련

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 9월 ~ 2026. 6월

❍ 위       치: 산청군 신등면 단계시장 일원

❍ 총 소요예산: 2,641백만원(도 576, 군 2,065)

❍ 사 업 내 용

- 단계시장 시설현대화사업(단계시장 장옥 정비공사), 주차장 조성사업,
스마트 경영 지원사업, 기타 활성화사업 등

□ 주요 추진사항

❍ 사업대상지 확정(경남도)	: 2022. 11월

❍ 상인회 협의 및 의겸수렴	: 2023.  1. ~ 9월

❍ 주차장 조성사업, 장옥 신축공사 실시설계 용역	: 2023. 10월

❍ 주차장 조성사업, 장옥 신축공사 착공	: 2023. 12월

❍ 장옥 철거 대비 임시장옥 설치․운영	: 2024.  2월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,641	2,641	2,641	2,452	-	596	1,856	-	2,452	-	596	1,856	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	2,641	-	25	2,576	20	10	10	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	576	-	-	576	-	-	-	-
군비	2,065	-	25	2,000	20	10	10	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
단계시장 활성화 방안 마련	합계	2,452	1,240	-	-	2,452	618	-	622
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	596	279	-	-	596	23	-	256
	군비	1,856	961	-	-	1,856	595	-	366
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 장옥 신축공사 및 주차장 조성사업 준공, 점포 입주, 임시장옥 철거 등	: 2024. 7월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제교통과 지역경제담당 (담당자 이태연, 6803)
	1-5
추진실적	40% (정상추진)		완료예상	2026년 6월
			목표달성여부	여

단계시장 활성화 방안 마련

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 9월 ~ 2026. 6월

❍ 위       치: 산청군 신등면 단계시장 일원

❍ 총 소요예산: 2,641백만원(도 576, 군 2,065)

❍ 사 업 내 용

- 단계시장 시설현대화사업(단계시장 장옥 정비공사), 주차장 조성사업,
스마트 경영 지원사업, 기타 활성화사업 등

□ 주요 추진사항

❍ 사업대상지 확정(경남도)	: 2022. 11월

❍ 상인회 협의 및 의겸수렴	: 2023.  1. ~ 9월

❍ 주차장 조성사업, 장옥 신축공사 실시설계 용역	: 2023. 10월

❍ 주차장 조성사업 착공	: 2023. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,641	2,641	2,641	2,452	-	596	1,856	-	2,452	-	596	1,856	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	2,641	-	25	2,576	20	10	10	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	576	-	-	576	-	-	-	-
군비	2,065	-	25	2,000	20	10	10	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
단계시장 활성화 방안 마련	합계	2,452	618	-	-	2,452	618	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	596	23	-	-	596	23	-	-
	군비	1,856	595	-	-	1,856	595	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 장옥 철거 대비 임시장옥 설치․운영	: 2024.  2월

❍ 장옥 철거공사, 폐기물 처리, 장옥 신축공사 착공 등	: 2024.  3월

❍ 장옥 신축공사 및 주차장 조성사업 준공, 점포 입주, 임시장옥 철거 등	: 2024.  6월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제교통과 지역경제담당 (담당자 이정훈)
	1-5
추진실적	10% (정상추진)		완료예상	2026년
			목표달성여부	여

단계시장 활성화 방안 마련

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022. 9월 ~

❍ 위    치 : 신등면 단계시장 일원

❍ 소요예산 : 2,641백만원(도비 576, 군비 2,065)

❍ 사업내용 : 단계시장 시설현대화사업, 단계시장 주차장 조성사업, 활성화사업 등

□ 추진사항

❍ 추석 장보기행사, 페이백 행사                          : 2022. 9월

❍ 단계시장 시설현대화사업 공모결과 발표 예정           : 2022. 10월

❍ 감정평가, 보상협의, 측량, 사업설계 등 시행               : 2023. 1월 ~

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	2,641	25	2,576	20	10	10
국비
도비	576		576
군비	2,065	25	2,000	20	10	10
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 기대효과

❍ 시설현대화를 통한 안전하고 쾌적한 시장환경 조성

❍ 다양한 연령대의 소비자 도입으로 시장 활력 도모

❍ 전통시장 경쟁력 강화를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 향후 추진계획

❍ 주차장 조성사업 및 현대화 사업 착공                  : 2023. 3월 ~

❍ 주차장 조성사업 및 현대화 사업 준공                  : 2023. 9월