구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제기업과 지역경제담당 (담당자 홍주연, 6803)
	1-6
추진실적 (기준일)	20% (장기추진) (2026. 1월 기준)		완료예상	임기 후
			목표달성여부	부

산청시장 주상복합 신축

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 9월 ~

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 산청시장 일원

❍ 총 소요예산: 80,000백만원(군비)

❍ 사 업 내 용: 산청시장 주상복합 신축사업

□ 주요 추진사항

❍ 추진계획 수립	: 2022.  7월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2022.  9월

❍ 추진위원회 구성	: 2022. 10월

❍ 타당성 조사 용역 과업기간 변경	: 2023.  3월

❍ 타당성 조사 용역 중간보고	: 2023.  4월

❍ 타당성 조사 용역 최종 보고회	: 2023.  7월

❍ 추진방향 설정 및 재원 조달 방안 모색	: 2024.  1월

❍ 공부 정리 용역 착공	: 2024.  3월

❍ 공부 정리 용역 준공	: 2024.  9월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
80,000	80,000	80,000	92	-	-	92	-	92	-	-	92	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	80,000	-	62	200	6,000	10,000	63,738	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	80,000	-	62	200	6,000	10,000	63,738	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청시장 주상복합 신축 사업	소계	92	73	64	-	-	54	28	19	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	92	73	64	-	-	54	28	19	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 보상금, 건축비 등 사업비 과다 예상, 사업 시행방안 검토 필요

⇒ LH(한국토지주택공사) 협약을 통한 도시계획시설사업 추진 고려 등

□ 향후 추진계획

❍ 1단계 사업 추진 계획 수립

- 산청시장 내부 구획 후 청년몰 조성 사업 추진	: 2026. 1월

(1단계 구간 토지 및 건축물 매입)

- 보상구역 내 사업 시행(인구소멸대응기금 활용)	: 2026. 1월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제기업과 지역경제담당 (담당자 최지은, 6803)
	1-6
추진실적 (기준일)	20% (장기추진) (2025. 6월 기준)		완료예상	임기 후
			목표달성여부	부

산청시장 주상복합 신축

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 9월 ~

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 산청시장 일원

❍ 총 소요예산: 80,000백만원(군 80,000)

❍ 사 업 내 용: 산청시장 주상복합 신축사업

□ 주요 추진사항

❍ 추진계획 수립	: 2022.  7월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2022.  9월

❍ 추진위원회 구성	: 2022. 10월

❍ 타당성 조사 용역 과업기간 변경	: 2023.  3월

❍ 타당성 조사 용역 중간보고	: 2023.  4월

❍ 타당성 조사 용역 최종 보고회	: 2023.  7월

❍ 추진방향 설정 및 재원 조달 방안 모색	: 2024.  1월

❍ 공부 정리 용역 착공	: 2024.  3월

❍ 공부 정리 용역 준공	: 2024.  9월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
80,000	80,000	80,000	92	-	-	92	-	92	-	-	92	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	80,000	-	62	200	6,000	10,000	63,738	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	80,000	-	62	200	6,000	10,000	63,738	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청시장 주상복합 신축 사업	소계	92	73	64	-	-	54	28	19	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	92	73	64	-	-	54	28	19	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 보상금, 건축비 등 사업비 과다 예상, 사업 시행방안 검토 필요

⇒ LH(한국토지주택공사) 협약을 통한 도시계획시설사업 추진 고려 등

□ 향후 추진계획

❍ 1단계 사업 추진 계획 수립

- 산청시장 내부 구획 후 청년몰 조성 사업 추진	: 2025. 8월

(1단계 구간 토지 및 건축물 매입)

- 보상구역 내 사업 시행(인구소멸대응기금 활용)	: 2025. 10월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제기업과 지역경제담당 (담당자 정재민, 6803)
	1-6
추진실적 (기준일)	20%(장기추진) (2025. 1월 기준)		완료예상	임기 후
			목표달성여부	부

산청시장 주상복합 신축

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 9월 ~

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 산청시장 일원

❍ 총 소요예산: 80,000백만원(군 80,000)

❍ 사 업 내 용: 산청시장 주상복합 신축사업

□ 주요 추진사항

❍ 추진계획 수립	: 2022.  7월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2022.  9월

❍ 추진위원회 구성	: 2022. 10월

❍ 타당성 조사 용역 과업기간 변경	: 2023.  3월

❍ 타당성 조사 용역 중간보고	: 2023.  4월

❍ 타당성 조사 용역 최종 보고회	: 2023.  7월

❍ 추진방향 설정 및 재원 조달 방안 모색	: 2024.  1월

❍ 공부 정리 용역 착공	: 2024.  3월

❍ 공부 정리 용역 준공	: 2024.  9월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
80,000	80,000	80,000	92	-	-	92	-	92	-	-	92	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	80,000	-	62	200	6,000	10,000	63,738	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	80,000	-	62	200	6,000	10,000	63,738	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청시장 주상복합 신축 사업	소계	92	73	64	-	-	54	28	19	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	92	73	64	-	-	54	28	19	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 보상금, 건축비 등 사업비 과다 예상, 사업 시행방안 검토 필요

⇒ LH(한국토지주택공사) 협약을 통한 도시계획시설사업 추진 고려 등

□ 향후 추진계획

❍ 1단계 사업 추진 계획 수립

- 단계적 사업 시행에 따른 공청회 등 주민설명회 개최	: 2025.  3월

- 산청시장 내부 구획 후 청년몰 조성 사업 추진	: 2025.  4월
(1단계 구간 토지 및 건축물 매입)

- 보상구역 내 사업 시행(인구소멸대응기금 활용)	: 2025.  6월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제교통과 지역경제담당 (담당자 이태연, 6803)
	1-6
추진실적 (기준일)	20%(장기추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	임기 후
			목표달성여부	부

산청시장 주상복합 신축

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 9월 ~

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 산청시장 일원

❍ 총 소요예산: 80,000백만원(군 80,000)

❍ 사 업 내 용: 산청시장 주상복합 신축사업

□ 주요 추진사항

❍ 추진계획 수립	: 2022.  7월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2022.  9월

❍ 추진위원회 구성	: 2022. 10월

❍ 타당성 조사 용역 과업기간 변경	: 2023.  3월

❍ 타당성 조사 용역 중간보고	: 2023.  4월

❍ 타당성 조사 용역 최종 보고회	: 2023.  7월

❍ 추진방향 설정 및 재원 조달 방안 모색	: 2024.  1월

❍ 공부 정리 용역 착공	: 2024.  3월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
80,000	80,000	80,000	92	-	-	92	-	92	-	-	92	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	80,000	-	62	200	6,000	10,000	63,738	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	80,000	-	62	200	6,000	10,000	63,738	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청시장 주상복합 신축 사업	소계	92	54	64	-	-	54	28	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	92	54	64	-	-	54	28	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 보상금, 건축비 등 사업비 과다 예상, 사업 시행방안 검토 필요

⇒ 민간투자, 국·도비 등 재원 조달 방안 모색

❍ 건축물, 토지 등 100명 이상의 소유자가 있으나 건축물대장, 등기사항증명서 등 공부 정리가 되어있지 않아 보상 등 향후 사업 추진이 어려움

⇒ 정비용역 시행으로 실소유자 확인 등 공부 정리 진행

□ 향후 추진계획

❍ 공부 정리 용역 준공	: 2024.  9월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제교통과 지역경제담당 (담당자 이태연, 6803)
	1-6
추진실적	20% (장기추진)		완료예상	임기 후
			목표달성여부	부

산청시장 주상복합 신축

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 9월 ~

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 산청시장 일원

❍ 총 소요예산: 80,000백만원(군 80,000)

❍ 사 업 내 용: 산청시장 주상복합 신축사업

□ 주요 추진사항

❍ 추진계획 수립	: 2022.  7월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2022.  9월

❍ 추진위원회 구성	: 2022. 10월

❍ 타당성 조사 용역 과업기간 변경	: 2023.  3월

❍ 타당성 조사 용역 중간보고	: 2023.  4월

❍ 타당성 조사 용역 최종 보고회	: 2023.  7월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
80,000	80,000	80,000	92	-	-	92	-	92	-	-	92	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	80,000	-	62	200	6,000	10,000	63,738	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	80,000	-	62	200	6,000	10,000	63,738	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청시장 주상복합 신축 사업	소계	92	54	64	-	-	54	28	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	92	54	64	-	-	54	28	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 보상금, 건축비 등 사업비 과다 예상, 사업 시행방안 검토 필요

⇒ 민간투자, 국·도비 등 재원 조달 방안 모색

❍ 건축물, 토지 등 100명 이상의 소유자가 있으나 건축물대장, 등기사항증명서 등 공부 정리가 되어있지 않아 보상 등 향후 사업 추진이 어려움

⇒ 정비용역 시행으로 실소유자 확인 등 공부 정리 진행

□ 향후 추진계획

❍ 추진방향 설정 및 재원 조달 방안 모색	: 2024.  1월 ~

❍ 공부 정리 용역 시행	: 2024.  2월 ~

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제교통과 지역경제담당 (담당자 이정훈)
	1-6
추진실적	15% (장기추진)		완료예상	2026년
			목표달성여부	여

산청시장 주상복합 신축

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022. 9월 ~

❍ 위    치 : 산청읍 옥산리 산청시장 일원

❍ 소요예산 : 80,000백만원 정도(군비) ※ 타당성 조사 용역 후(65백만원) 총사업비 설정

❍ 사업내용 : 산청시장 주상복합 신축사업

□ 추진사항

❍ 추진계획 수립                                        : 2022. 7월

❍ 타당성 조사 용역비 예산 확보                         : 2022. 8월

❍ 타당성 조사 용역 시행                                : 2022. 9월

❍ 추진위원회 구성                                      : 2022. 10월

❍ 추진위원회 발대식 개최                               : 2022. 12월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	80,000	62	200	6,000	10,000	63,738
국비
도비
군비	80,000	62	200	6,000	10,000	63,738
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 보상금, 건축비 등 사업비 과다 예상

→ 민간투자, 국․도비 확보 등 재원 확보 방안 모색

□ 향후 추진계획

❍ 타당성 조사 수행                                   : 2023. 3월

❍ 주민설명회 등 사전 행정절차 이행                   : 2023. 6월 ~ 9월

❍ 추진방향 설정 및 재원 조달 방안 모색               : 2023. 10월 ~ 12월