구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 고건수, 7313)
	1-8
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2026. 1월 기준)		완료	2025년 12월
			목표달성여부	여

도시재생 사업(옥산지구)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2028년(4년간)

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 163-1번지 일원(옥산지구)

❍ 총 소요예산: 24,653백만원(국비 14,659, 도비 1,954, 군비 8,040)

❍ 사 업 내 용: 옥산지구 도시재생사업 A=148,530㎡

- 산청 체류거점 공간 조성, 도심둘레길 조성, 폭우·폭염대비 방재사업 등

□ 주요 추진사항

❍ 활성화계획 수립 및 행정절차 이행, 공모사업 평가     : 2025.  4. ~ 11월

❍ 공모사업 선정                                       : 2025. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
17,500	26,921	4,880	24,653	14,659	1,954	8,040	-	24,653	14,659	1,954	8,040	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	26,921	-	-	-	200	3,150	1,530	22,041
국비	15,000	-	-	-	-	1,810	900	12,290
도비	2,000	-	-	-	-	250	120	1,630
군비	9,646	-	-	-	200	1,090	510	7,846
기타	275	-	-	-	-	-	-	275

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
옥산지구 도시재생사업	합계	24,653	219	-	-	-	-	170	170	50	49	24,433	-
	국비	14,659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,659	-
	도비	1,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,954	-
	군비	8,040	219	-	-	-	-	170	170	50	49	7,820	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 향후 추진계획

❍ 경상남도 지방도시재생위원회 계획 심의	: 2026.  3월

❍ 도시재생활성화계획 승인 및 고시               : 2026.  3월

❍ 건축(토목 등) 설계 공모 및 착공                : 2026.  3. ~ 5월

❍ 사업 착공 예정                                : 2027.  5월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 김현지, 7313)
	1-8
추진실적 (기준일)	10% (장기추진) (2025. 6월 기준)		완료예상	2029년 12월
			목표달성여부	부

도시재생 사업(옥산지구)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2025 ~ 2028년(4년간)

- 변경: 2026년 ~ 2029년(4년간)

- 변경사유: 공모사업 미선정으로 인한 사업기간 변경

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 160-1번지 일원(옥산지구)

❍ 총 소요예산: 26,921백만원(국비 15,000, 도비 2.000, 군비 9,646, 기타 275)

❍ 사 업 내 용: k-웰니스 트레킹 허브 거점조성사업, 한마음공원 리모델링,
시장골목 폭우 대비 침수예방사업 등

□ 주요 추진사항

❍ 도시재생활성화계획 수립 용역 착수              : 2025.  4월

❍ 활성화계획 수립 및 행정절차 이행, 공모신청     : 2025.  4월 ~ 9월(신청)

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
17,500	26,921	26,921	220	-	-	220	-	220	-	-	220	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	26,921	-	-	-	200	3,150	1,530	22,041
국비	15,000	-	-	-	-	1,810	900	12,290
도비	2,000	-	-	-	-	250	120	1,630
군비	9,646	-	-	-	200	1,090	510	7,846
기타	275	-	-	-	-	-	-	275

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
도시재생 사업 (옥산지구)	합계	220	193	-	-	-	-	170	170	50	23
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	220	193	-	-	-	-	170	170	50	23
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 도시재생분야 정부정책 여건 변화로 사업 규모 및 예산 축소

❍ 공모사업 선정 및 국비 예산확보를 위한 다방면 노력

□ 향후 추진계획

❍ 활성화계획 수립 및 행정절차 이행, 공모신청	: 2025.  4월 ~ 9월(신청)

❍ 공모사업(지역특화재생형) 선정 결정	: 2025. 12월

❍ 공모사업 추진	: 2026.  1월 ~ 2029. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 김현지, 7313)
	1-8
추진실적 (기준일)	10%(장기추진) (2025. 1월 기준)		완료예상	2028년 12월
			목표달성여부	부

도시재생사업(옥산지구)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023 ~ 2028년

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 163-1번지 일원(옥산지구)

❍ 총 소요예산: 26,921백만원(국비 15,000, 도비 2,000, 군비 9,646, 기타 275)

* 2024. 12월 도시재생 공모사업 미선정

❍ 사 업 내 용: k-웰니스 트레킹 허브 거점조성사업, 한마음공원 리모델링, 시장골목 웰니스 광장 등

□ 주요 추진사항

❍ 도시재생활성화계획 수립 용역 착수	: 2024.  2월

❍ 활성화계획 수립 및 행정절차 이행	: 2024.  2월 ~ 9월(신청)

❍ 도시재생사업 공모신청	: 2024.  9월

❍ 도시재생사업 공모미선정	: 2024. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
17,500	26,921	4,880	219	-	-	219	-	219	-	-	219	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	26,921	-	-	-	200	3,150	1,530	22,041
국비	15,000	-	-	-	-	1,810	900	12,290
도비	2,000	-	-	-	-	250	120	1,630
군비	9,646	-	-	-	200	1,090	510	7,846
기타	275	-	-	-	-	-	-	275

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
도시재생 사업 (옥산지구)	소계	219	170	-	-	-	-	200	170	19	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	219	170	-	-	-	-	200	170	19	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 도시재생분야 정부정책 여건 변화로 사업 규모 및 예산 축소

❍ 공모사업 선정 및 국비 예산확보를 위한 다방면 노력

□ 향후 추진계획

❍ 활성화계획 수립 및 행정절차 이행, 공모신청	: 2025.  2월 ~  9월(신청)

❍ 공모사업(지역특화재생형) 선정 결정	: 2025. 12월

❍ 공모사업 추진	: 2026.  1월 ~ 2028. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 지효수, 7311)
	1-8
추진실적 (기준일)	10%(장기추진) (2024. 8. 28. 기준)		완료예상	2028년 12월
			목표달성여부	부

도시재생사업(옥산지구)(변경)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023 ~ 2028년

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 163-1번지 일원(옥산지구)

❍ 총 소요예산: 269.21억원(국비 150, 도 20, 군 96.46, 기타 2.75)

* 2024. 12월 도시재생 공모사업 선정 후 확보 가능

❍ 사 업 내 용: 활력더함 복합거점센터조성, 약선테마거리조성, 시장환경정비 등

□ 주요 추진사항

❍ 도시재생사업 공모 미선정	: 2021.  1월

❍ 도시재생사업 공모 미선정	: 2022. 12월

❍ 도시재생활성화계획 수립 용역 착수	: 2024.  2월

❍ 도시재생사업(특화재생) 국토부(HUG) 컨설팅	: 2024.  6월

❍ 주민공청회 실시	: 2024.  8월

❍ 군의회 의견청취 실시	: 2024.  9월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
17,500	26,921	4,880	200	-	-	200	-	200	-	-	200	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액			임기 내 투자 계획			임기 후
		21년 까지	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	26,921	-	-	-	200	3,150	1,530	22,041
국비	15,000	-	-	-	-	1,810	900	12,290
도비	2,000	-	-	-	-	250	120	1,630
군비	9,646	-	-	-	200	1,090	510	7,846
기타	275	-	-	-	-	-	-	275

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
도시재생 사업 (옥산지구)	합계	200	100	-	-	-	-	200	100
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	200	100	-	-	-	-	200	100
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 2024년 도시재생활성화계획 수립 용역 착수하여 진행하고 있으나, 국토부 방침 변경으로 공모물량 대폭 감소하여 선정 어려움

❍ 행정절차 조속한 이행으로 공모사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ 공모사업 추진 및 신청	: 2024.  9월

❍ 공모사업(특화재생) 결정	: 2024. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 김현지, 7313)
	1-8
추진실적 (기준일)	10%(장기추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2028년 12월
			목표달성여부	부

도시재생사업(옥산지구)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023 ~ 2026.(4년간)

- 변경: 2025년 ~ 2028년(4년간)

- 변경사유: 공모사업 미선정으로 인한 사업기간 변경

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 160-1번지 일원(옥산지구)

❍ 총 소요예산: 17,500백만원(국비 10,500, 도비 2,100, 군비 4,900)

* 2024. 12월 도시재생 공모사업 선정 후 확보 가능

❍ 사 업 내 용: 활력더함 복합거점센터조성, 약선테마거리조성, 시장환경정비 등

□ 주요 추진사항

❍ 도시재생활성화계획 수립 용역 착수              : 2024.  2월

❍ 활성화계획 수립 및 행정절차 이행, 공모신청     : 2024.  2월 ~ 9월(신청)

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
17,500	17,500	17,500	200	-	-	200	-	200	-	-	200	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	17,500	-	-	4,951	7,348	4,128	1,073	-
국비	10,500	-	-	2,971	4,409	2,477	643	-
도비	1,400	-	-	396	588	330	86	-
군비	5,600	-	-	1,584	2,351	1,321	344	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
도시재생 사업 (옥산지구)	합계	200	100	-	-	-	-	200	100
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	200	100	-	-	-	-	200	100
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 도시재생분야 정부정책 여건 변화로 사업 규모 및 예산 축소

❍ 공모사업 선정 및 국비 예산확보를 위한 다방면 노력

□ 향후 추진계획

❍ 활성화계획 수립 및 행정절차 이행, 공모신청	: 2024.  2월 ~ 9월(신청)

❍ 공모사업(지역특화재생형) 선정 결정	: 2024. 12월

❍ 공모사업 추진	: 2025. 1. ~ 2028. 12.

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 김현지, 7313)
	1-8
추진실적	10% (장기추진)		완료예상	2028년 12월
			목표달성여부	부

도시재생사업(옥산지구)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023 ~ 2026.(4년간)

- 변경: 2025년 ~ 2028년(4년간)

- 변경사유: 공모사업 미선정으로 인한 사업기간 변경

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 160-1번지 일원

❍ 총 사 업 비: 175억원(국비 60%, 도비 12%, 군비 28%)

* 2024. 12월 도시재생 공모사업 선정 후 확보 가능

❍ 사 업 내 용: 활력더함 복합거점조성, 약선 특화 중심‧골목상권 활성화, 시장환경정비

□ 주요 추진사항

❍ 공모사업 신청(미선정)                                : 2022.   9월

❍ 방재계획 수립 등 사전절차 이행                      : 2023.   5월

❍ 도시재생활성화계획 수립 용역 사업자 선정            : 2024.   2월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
17,500	17,500	17,500	200	-	-	200	-	200	-	-	200	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	17,500	-	-	4,951	7,348	4,128	1,073	-
국비	10,500	-	-	2,971	4,409	2,477	643	-
도비	1,400	-	-	396	588	330	86	-
군비	5,600	-	-	1,584	2,351	1,321	344	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
도시재생 사업 (옥산지구)	합계	200	-	-	-	-	-	200	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	200	-	-	-	-	-	200	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 도시재생분야의 정부정책 여건 변화로 공모사업 및 예산 축소 가능

❍ 공모사업 선정 및 국비 예산확보를 위한 다양한 노력 필요

□ 향후 추진계획

❍ 2024년도 공모사업 신청                      : 2024.   9월

❍ 공모사업 결정 및 예산확보                   : 2024.  12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 정춘기)
	1-8
추진실적	5% (장기추진)		완료예상	2026년 6월
			목표달성여부	부

도시재생사업(옥산지구)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

❍ 위    치 : 산청읍 옥산리 160-1번지 일원

❍ 소요예산 : 17,500백만원(국비 10,500, 도비 1,400, 군비 5,600)

* 2023. 12월 도시재생 공모사업 선정 후 확보 가능

❍ 사업내용 : 약선 특화 중심‧골목상권 활성화, 주거환경개선 및 골목 정비

□ 추진사항

❍ 공모사업 추진                                        : 2022. 9. ~ 12월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	17,500			4,951	7,348	4,128	1,073
국비	10,500			2,971	4,409	2,477	643
도비	1,400			396	588	330	86
군비	5,600			1,584	2,351	1,321	344
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 도시재생분야의 정부정책 여건 변화로 공모사업 및 예산 축소 가능

❍ 국비 예상확보를 위한 다양한 노력 경주

□ 향후 추진계획

❍ 도시재생 활성화 계획 용역 시행                         : 2023.  3월

❍ 공모사업 신청                                          : 2023.  9월

❍ 공모사업 결정                                          : 2023. 12월