구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 주택담당 (담당자 강태환, 7361)
	1-9
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2026. 1월 기준)		완료	2024년 6월
			목표달성여부	여

대형아파트 유치

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2019. 6월 ~ 2024. 6월

❍ 위       치: 신안면 하정리 754-1번지 일원

❍ 총 소요예산: 18,900백만원(LH 11,200, 군 7,700)

❍ 사 업 내 용

- 공공임대주택: 1동(지하1층, 지상12층), 82세대, 연면적 6,005.78㎡

- 신안면사무소: 1동(지상 3층), 연면적 993.87㎡

□ 주요 추진사항

❍ 국토교통부 공모사업 선정	: 2019.  6월

❍ 사업계획 승인	: 2020. 12월

❍ 공사 착공	: 2021.  7월

❍ 공공주택(공공임대주택) 준공 및 입주	: 2024.  2월

※ 공공임대주택 입주현황

(2025. 5. 기준)

단지명	주택규모	주택유형	전체호수	입주호수	공가율(%)
한여울마을 (산청신안행복주택)	합 계		82	65	20
	29.76㎡ (9평)	국민임대	12	9
	46.99㎡ (13평)	국민임대	18	16
	21.89㎡ (6평)	행복주택	31	24
	26.65㎡ (7평)	행복주택	9	6
	36.83㎡ (10평)	행복주택	12	10

❍ 공공청사(신안면사무소) 준공 및 개소	: 2024. 6. 7.

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
18,900	18,900	3,050	18,900	-	-	7,700	11,200	3,050	-	-	3,050	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	18,900	15,850	2,450	600	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	7,700	4,650	2,450	600	-	-	-	-
기타	11,200	11,200	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
신안면 사무소 복합개발사업	소계	3,050	3,050	2,450	2,450	600	600	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	3,050	3,050	2,450	2,450	600	600	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-		-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 주택담당 (담당자 강태환, 7361)
	1-9
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 6월 기준)		완료	2024년 6월
			목표달성여부	여

대형아파트 유치

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2019. 6. ~ 2024. 6.

❍ 위       치: 신안면 하정리 754-1번지 일원

❍ 총 소요예산: 18,900백만원(LH 11,200, 군 7,700)

❍ 사 업 내 용

- 공공임대주택: 1동(지하1층, 지상12층), 82세대, 연면적 6,005.78㎡

- 신안면사무소: 1동(지상 3층), 연면적 993.87㎡

□ 주요 추진사항

❍ 국토교통부 공모사업 선정	: 2019.  6월

❍ 사업계획 승인	: 2020. 12월

❍ 공사 착공	: 2021.  7월

❍ 공공주택(공공임대주택) 준공 및 입주	: 2024.  2월

※ 공공임대주택 입주현황

(2025. 5. 기준)

단지명	주택규모	주택유형	전체호수	입주호수	공가율(%)
한여울마을 (산청신안행복주택)	합 계		82	65	20
	29.76㎡ (9평)	국민임대	12	9
	46.99㎡ (13평)	국민임대	18	16
	21.89㎡ (6평)	행복주택	31	24
	26.65㎡ (7평)	행복주택	9	6
	36.83㎡ (10평)	행복주택	12	10

❍ 공공청사(신안면사무소) 준공 및 개소	: 2024. 6. 7.

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
18,900	18,900	3,050	18,900	-	-	7,700	11,200	3,050	-	-	3,050	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	18,900	15,850	2,450	600	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	7,700	4,650	2,450	600	-	-	-	-
기타	11,200	11,200	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
대형 아파트 유치	소계	3,050	3,050	2,450	2,450	600	600	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	3,050	3,050	2,450	2,450	600	600	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-		-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 신안면사무소 최종 건설사업비 준공정산	: 2025. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 주택담당 (담당자 강태환, 7361)
	1-9
추진실적	100%(완료) (2024. 6월 기준)		완료	2024년 6월
			목표달성여부	여

대형아파트 유치

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2019. 6. ~ 2024. 6.

❍ 위       치: 신안면 하정리 754-1번지 일원

❍ 총 소요예산: 18,900백만원(LH 11,200, 군 7,700)

❍ 사 업 내 용

- 공공임대주택: 1동(지하1층, 지상12층), 82세대, 연면적 6,005.78㎡

- 신안면사무소: 1동(지상 3층), 연면적 993.87㎡

□ 주요 추진사항

❍ 국토교통부 공모사업 선정	: 2019.  6월

❍ 사업계획 승인	: 2020. 12월

❍ 공사 착공	: 2021.  7월

❍ 공공주택(공공임대주택) 준공 및 입주	: 2024.  2월

❍ 공공청사(신안면사무소) 준공 및 개소	: 2024. 6. 7.

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
18,900	18,900	3,050	18,900	-	-	7,700	11,200	3,050	-	-	3,050	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	18,900	15,850	2,450	600	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	7,700	4,650	2,450	600	-	-	-	-
기타(LH)	11,200	11,200	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
대형 아파트 유치	소계	3,050	3,050	2,450	2,450	600	600	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	3,050	3,050	2,450	2,450	600	600	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 공공임대주택 건립 및 면사무소 재건축에 따른 주차 부족 예상

❍ 농촌중심지 활성화사업과 연계하여 주차장 확보

□ 향후 추진계획

❍ 공공청사(신안면사무소) 준공 및 개소           : 2024. 6. 7.

※공동주택(공공임대주택) 준공 및 입주(2024. 2월 완료)

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 주택담당 (담당자 강태환, 7361)
	1-9
추진실적	85% (정상추진)		완료예상	2024년 5월
			목표달성여부	여

대형아파트 유치

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2019. 6. ~ 2024. 6.

❍ 위       치: 신안면 하정리 754-1번지 일원

❍ 총 소요예산: 18,900백만원(LH 11,200, 군 7,700)

❍ 사 업 내 용

- 공공임대주택: 1동(지하1층, 지상12층), 82세대, 연면적 6,005.78㎡

- 신안면사무소: 1동(지상 3층), 연면적 993.87㎡

□ 주요 추진사항

❍ 국토교통부 공모사업 선정                      : 2019.  6월

❍ 사업계획 승인                                 : 2020. 12월

❍ 공사 착공                                     : 2021.  7월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
18,900	18,900	3,050	18,900	-	-	7,700	11,200	3,050	-	-	3,050	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	18,900	15,850	2,450	600	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	7,700	4,650	2,450	600	-	-	-	-
기타(LH)	11,200	11,200	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
대형 아파트 유치	소계	3,050	3,050	2,450	2,450	600	600	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	3,050	3,050	2,450	2,450	600	600	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 공공임대주택 건립 및 면사무소 재건축에 따른 주차 부족 예상

❍ 농촌중심지 활성화사업과 연계하여 주차장 확보 추진

□ 향후 추진계획

❍ 공동주택(공공임대주택) 준공 및 입주            : 2024. 2월

❍ 공공청사(신안면사무소) 준공                    : 2024. 5월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 주택담당 (담당자 안성호)
	1-9
추진실적	80% (정상추진)		완료예상	2024년 2월
			목표달성여부	여

대형아파트 유치(신안면)(변경)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 6. ~ 2024. 2월

❍ 위    치 : 신안면 하정리 754-1번지 일원

❍ 소요예산 : 18,900백만원(LH 11,200, 군 7,700)

❍ 사업내용

- 공공임대주택 : 1동(지하1층 지상12층), 82세대, 연면적 6,005.78㎡

- 신안면사무소 : 1동(지상 3층), 연면적 993.87㎡

□ 추진사항

❍ 국토교통부 공모사업 선정                           : 2019. 6월

❍ 사업계획 승인                                           : 2020. 12월

❍ 공사 착공                                               : 2021.  7월

□ 문제점 및 대책

❍ 공공임대주택 건립 및 면사무소 재건축에 따른 주차 부족 예상

❍ 농촌중심지 활성화사업과 연계하여 주차장 확보 추진

□ 향후 추진계획

❍ 공동주택 및 공공청사 준공                             : 2023. 11월

❍ 공공청사(신안면사무소) 입주                            : 2023. 12월

❍ 공동주택(공공임대주택) 입주                            : 2024.  2월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 정춘기)
	1-9
추진실적	5% (정상추진)		완료예상	2026년 6월
			목표달성여부	여

대형아파트 유치(신안면)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2024. 12월(구역지정일로부터 4년 6개월)

❍ 위    치 : 신안면 하정리 산58번지 일원

❍ 소요예산 : 21,035백만원(공사비 9,535, 보상비 4,400, 기타비용 7,100)

[※ 아파트 공사비 별도]

❍ 사업내용 : 도시개발사업(A = 47,320㎡)

❍ 사업규모: 1,003명/401세대 (공동주택 390세대, 단독주택 11세대)

❍ 시행방식: 수용 또는 사용방식(민간개발사업으로 추진)

□ 추진사항

❍ 하정지구 도시개발구역 지정 제안 및 수용                 : 2018. 11월

❍ 하정지구 도시개발구역 지정 및 지형도면 고시(경상남도)    : 2020.  6월

❍ 실시계획인가 고시(경상남도)                              : 2022.  1월

□ 문제점 및 대책

❍ 민간사업자 개발사업으로 자금조달 및 운용 어려움

❍ 수용 또는 사용방식 도시개발사업으로 토지소유자와 협의 어려움

❍ 원활한 사업추진을 위한 행정적 지원 및 지도 철저

□ 향후 추진계획

❍ 도시개발사업 준공                                       : 2024.  12월