구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 진현우, 7844)
	2-11
추진실적 (기준일)	10% (장기추진) (2026. 1월 기준)		완료예상	2027년 12월
			목표달성여부	여

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2024 ~ 2027년

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 25,219백만원(국비 12,600, 도비 2,520, 군비 2,539, 융자 5,040, 자담 2,520)

❍ 사 업 내 용: 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화)시설 건립

□ 주요 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의	: 2022. 10월

❍ 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의	: 2023.  2월

❍ 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의	: 2023.  4월

❍ 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협)	: 2023.  4월

- 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여
공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함

❍ 사업대상지 물색	: 2023.  4월

❍ 축분퇴비유통센터 이전 타당성 용역 시행

- 사업비 345억원 이상 소요 및 부지선정 애로 판단        : 2024.  1월

❍ 창녕군 영산면 공동자원화시설 견학(군수 외 4명)           : 2024.  5월

❍ 오부면 소재지 내 부지선정 관련 탐방(과장 외 1명)

- 연면적 및 계획관리지역 확인 등으로 부지선정 애로     : 2025.  6월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
25,200	25,219	15,219	19	-	-	19	-	19	-	-	19	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	25,219	-	-	-	19	5,200	10,000	10,000
국비	12,600	-	-	-	-	2,600	5,000	5,000
도비	2,520	-	-	-	-	520	1,000	1,000
군비	2,519	-	-	-	19	500	1,000	1,000
기타(자부담)	7,580	-	-	-	-	1,580	3,000	3,000

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
축산분뇨자원화 (공동자원화시설(함양산청 축협 축분퇴비유통센터) 이전 타당성 용 역)	합계	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 이전 타당성 용역 결과 사업비 252억에서 345억으로 증가할 것으로 예상

❍ 축분퇴비유통센터 이전 사업부지 확보 애로

❍ 공모사업 신청시 부지 및 인근마을 주민 동의 절차 이행 필요

□ 향후 추진계획

❍ 축산농가 교육, 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행     : 2026.  2월

❍ 사업신청                                              : 2026.  3월

❍ 사업시행 및 완료                                      : 2026 ~ 2028년

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 진현우, 7844)
	2-11
추진실적 (기준일)	10% (장기추진) (2025. 6월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2024 ~ 2027년

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 25,219백만원(국비 12,600, 도비 2,520, 군비 2,539, 융자 5,040, 자담 2,520)

❍ 사 업 내 용: 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화)시설 건립

□ 주요 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의	: 2022. 10월

❍ 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의	: 2023.  2월

❍ 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의	: 2023.  4월

❍ 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협)	: 2023.  4월

- 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여
공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함

❍ 사업대상지 물색	: 2023.  4월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2024.  1.~5월

❍ 창녕군 영산면 공동자원화시설 견학(군수 외 4명)	: 2024.  5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
25,200	25,219	15,219	19	-	-	19	-	19	-	-	19	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	25,219	-	-	-	19	5,200	10,000	10,000
국비	12,600	-	-	-	-	2,600	5,000	5,000
도비	2,520	-	-	-	-	520	1,000	1,000
군비	2,519	-	-	-	19	500	1,000	1,000
기타(자부담)	7,580	-	-	-	-	1,580	3,000	3,000

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
함양산청 축협 축분퇴비유통센터 이전	합계	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 사업부지 선정 및 주민동의 절차 이행 애로

⇒ 이전 타당성 조사 용역 결과를 바탕으로 추진방향 결정

□ 향후 추진계획

❍ 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행      : 2025. 12월

❍ 가축분뇨 공동자원화사업 신청             : 2026. 3월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 진현우, 7844)
	2-11
추진실적	5%(장기 추진) (2025. 1월 기준)		완료예상	2027년 12월
			목표달성여부	여

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2024. ~ 2027년

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 25,219백만원(국비 12,600, 도비 2,520, 군비 2,539, 융자 5,040, 자담 2,520)

❍ 사 업 내 용: 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화)시설 건

□ 주요 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의	: 2022. 10월

❍ 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의	: 2023.  2월

❍ 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의	: 2023.  4월

❍ 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협)	: 2023.  4월

- 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여

공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함

❍ 사업대상지 물색	: 2023.  4월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2024.  5월

❍ 창녕군 영산면 공동자원화시설 견학(군수 외 4명): 2024. 5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
25,200	25,219	15,219	19	-	-	19	-	19	-	-	19	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	25,219	-	-	-	19	5,200	10,000	10,000
국비	12,600	-	-	-	-	2,600	5,000	5,000
도비	2,520	-	-	-	-	520	1,000	1,000
군비	2,519	-	-	-	19	500	1,000	1,000
기타	7,580	-	-	-	-	1,580	3,000	3,000

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
함양산청 축협 축분퇴비유통센터 이전	소계	19	19	-	-	-	-	19	19	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	19	19	-	-	-	-	19	19	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 이전 타당성 용역 결과 사업비 252억에서 345억으로 증가할 것으로 예상

❍ 축분퇴비유통센터 이전 사업부지 확보 애로

❍ 공모사업 신청시 부지 및 인근마을 주민 동의 절차 이행 필요

□ 향후 추진계획

❍ 축산농가 교육, 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행	: 2025. 8월

❍ 사업신청	: 2026. 3월

❍ 사업시행 및 완료	: 2026. ~ 2027년

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 박수헌, 7844)
	2-11
추진실적 (기준일)	5%(장기 추진) (2024. 8. 28. 기준)		완료예상	2027년 12월
			목표달성여부	여

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전(변경)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2027년

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 25,219백만원(국비12,600, 도비25,20, 군비2,539, 융자75,60)

❍ 사 업 내 용: 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화 정화)
시설 신규 건립

□ 주요 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의	: 2022. 10월

❍ 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의	: 2023. 2월

❍ 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의	: 2023. 4월

❍ 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협)	: 2023. 4월

- 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여

공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함

❍ 사업대상지 물색	: 2023. 4월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2024. 1월~5월

❍ 창녕군 영산면 공동자원화시설 견학(군수 외 4명)             : 2024. 5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
25,200	25,219	25,219	19	-	-	19	-	19	-	-	19	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액			임기 내 투자 계획			임기 후
		21년 까지	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	25,219	-	-	-	19	5,200	10,000	10,000
국비	12,600	-	-	-	-	2,600	5,000	5,000
도비	2,520	-	-	-	-	520	1,000	1,000
군비	2,519	-	-	-	19	500	1,000	1,000
기타	7,580	-	-	-	-	1,560	3,000	3,000

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
함양산청 축협 축분퇴비유통센터 이전	소계	19	-	-	-	-	-	19	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	19	-	-	-	-	-	19	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 이전 타당성 용역 결과 사업비 252억에서 345억으로 증가할 것으로 예상

❍ 축분퇴비유통센터 이전 사업부지 확보 애로

❍ 공모사업 신청시 부지 및 인근마을 주민 동의 절차 이행 필요

□ 향후 추진계획

❍ 축산농가 교육, 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행     : 2025. 02월

❍ 사업신청                                              : 2025. 03월

❍ 사업시행 및 완료                                      : 2025. ~ 2027년

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 박수헌, 7844)
	2-11
추진실적 (기준일)	5%(장기 추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2026년

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 25,200백만원(국비 12,600, 도비 2,520, 군비 2,520, 융자 5,040, 자담 2,520)

❍ 사 업 내 용: 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화)시설 건립

□ 주요 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의	: 2022. 10월

❍ 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의	: 2023. 2월

❍ 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의	: 2023. 4월

❍ 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협)	: 2023. 4월

- 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여

공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함

❍ 사업대상지 물색	: 2023. 4월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2024. 1월~5월

❍ 창녕군 영산면 공동자원화시설 견학(군수 외 4명)             : 2024. 5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
25,200	25,200	25,200	19	-	-	19	-	19	-	-	19	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	25,200	-	-	-	25,200	-	-	-
국비	12,600	-	-	-	12,600	-	-	-
도비	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-
군비	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-
융자	5,040	-	-	-	5,040	-	-	-
기타(자부담)	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
함양산청 축협 축분퇴비유통센터 이전	소계	19	-	-	-	-	-	19	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	19	-	-	-	-	-	19	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 사업부지 선정 및 주민동의 절차 이행 애로

- 이전 타당성 조사 용역 결과를 바탕으로 추진방향 결정

□ 향후 추진계획

❍ 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행             : 2024. 12월

❍ 가축분뇨 공동자원화사업 신청                    : 2026. 3월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 박수헌, 7844)
	2-11
추진실적	5% (장기 추진)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2026년

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 25,200백만원(국비 12,600, 도비 2,520, 군비 2,520, 융자 5,040, 자담 2,520)

❍ 사 업 내 용: 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화)시설 건립

□ 주요 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의	: 2022. 10월

❍ 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의	: 2023. 2월

❍ 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의	: 2023. 4월

❍ 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협)	: 2023. 4월

- 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여

공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함

❍ 사업대상지 물색	: 2023. 4월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2024. 1월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
25,200	25,200	25,200	19	-	-	19	-	19	-	-	19	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	25,200	-	-	-	25,200	-	-	-
국비	12,600	-	-	-	12,600	-	-	-
도비	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-
군비	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-
융자	5,040	-	-	-	5,040	-	-	-
기타(자부담)	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
함양산청 축협 축분퇴비유통센터 이전	소계	19	-	-	-	-	-	19	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	19	-	-	-	-	-	19	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 사업부지 선정 및 주민동의 절차 이행 애로

- 이전 타당성 조사 용역 결과를 바탕으로 추진방향 결정

□ 향후 추진계획

❍ 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행             : 2024. 12월

❍ 가축분뇨 공동자원화사업 신청                    : 2025. 3월

❍ 사업시행 및 완료                                : 2025 ~ 2026년

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 백종수)
	2-11
추진실적	5% (정상추진)		완료예상	2026년 6월
			목표달성여부	여

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 소요예산 : 25,200백만원

❍ 사업내용 : 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화)시설 이전

□ 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의     : 2022. 10월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	25,200				25,200
국비	12,600				12,600
도비	2,520				2,520
군비	2,520				2,520
기타	7,560				7,560

□ 문제점 및 대책

❍ 사업부지 선정 및 주민동의 절차 이행 애로

- 공동협의체 구성하여 후보지를 3 ~ 4개소 선정 후 지역주민 동의 추진

- 지역주민과 공동운영 및 숙원사업 지원 등 제시

□ 향후 추진계획

❍ 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행               : 2024. 2월

❍ 사업신청                                          : 2024. 3월

❍ 사업시행 및 완료                                  : 2025 ~ 2026년