구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 곽대영, 7332)
	3-2
추진실적 (기준일)	30% (정상추진) (2026. 1월 기준)		완료예상	2026년 6월
			목표달성여부	여

어린이 놀이마당 조성

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2026년

❍ 위       치: 산청군 시천면 사리 일원

❍ 총 소요예산: 400백만원(국비 280, 도비 36, 군비 84)

❍ 사 업 내 용: 어린이 놀이마당 조성(524㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 기본계획 수립 착수 및 완료	: 2022.  7. ~ 2023. 8월

❍ 시행계획 수립 착수	: 2023. 10월

❍ 시행계획 수립 완료                            : 2025.  6월

❍ 시행계획 고시                                  : 2025. 7월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
400	400	400	400	280	36	84	-	400	280	36	84	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	400	-	-	100	100	200	-	-
국비	280	-	-	70	70	140	-	-
도비	36	-	-	9	9	18	-	-
군비	84	-	-	21	21	42	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
시천면 농촌중심지 활성화사업	합계	400	200	-	-	100	-	100	200	200	-	-	-
	국비	280	140	-	-	70	-	70	140	140	-	-	-
	도비	36	18	-	-	9	-	9	18	18	-	-	-
	군비	84	42	-	-	21	-	21	42	42	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 사업부지가 시천주민생활복합센터 조성사업 대상지와 접하고 있어 센터의 준공 시기를 고려한 사업추진이 필요하여 추진상황 수시 검토로 조기 실착공 추진

□ 향후 추진계획

❍ 공사 착공                                              : 2026. 1월

❍ 공사 준공                                              : 2026. 6월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 홍대운, 7332)
	3-2
추진실적 (기준일)	20% (정상추진) (2025. 6월 기준)		완료예상	2026년 6월
			목표달성여부	여

어린이 놀이마당 조성

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 1월 ~ 2026. 12월

❍ 위       치: 산청군 시천면 사리 일원

❍ 총 소요예산: 400백만원(국비 280, 도비 36, 군비 84)

❍ 사 업 내 용: 어린이 놀이마당 조성(524㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 기본계획 수립 착수 및 완료	: 2022.  7월 ~ 2023. 8월

❍ 시행계획 수립 착수	: 2023. 10월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
400	400	400	400	280	36	84	-	400	280	36	84	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	400	-	-	100	100	200	-	-
국비	280	-	-	70	70	140	-	-
도비	36	-	-	9	9	18	-	-
군비	84	-	-	21	21	42	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
어린이 놀이마당 조성	소계	400	200	-	-	100	-	-	200	200	-
	국비	200	140	-	-	70	-	-	140	140	-
	도비	36	18	-	-	9	-	-	18	18	-
	군비	84	42	-	-	21	-	-	42	42	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 사업부지가 시천주민생활복합센터 조성사업 대상지와 접하고 있어 센터의 준공 시기를 고려한 사업추진이 필요하여 추진상황 수시 검토로 조기 실착공 추진

□ 향후 추진계획

❍ 시행계획 수립 완료	: 2025.  6월

❍ 공사 착공	: 2026.  1월

❍ 공사 준공	: 2026.  6월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 홍대운, 7332)
	3-2
추진실적 (기준일)	20%(정상추진) (2025. 1월 기준)		완료예상	2025년 6월
			목표달성여부	여

어린이 놀이마당 조성

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 1. ~ 2025. 6월

❍ 위       치: 산청군 시천면 사리 일원

❍ 총 소요예산: 400백만원(국비 280, 도비 36, 군비 84)

❍ 사 업 내 용: 어린이 놀이마당 조성(524㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 기본계획수립 착수 및 완료                    : 2022.  7월 ~ 2023. 8월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
400	400	400	400	280	36	84	-	400	280	36	84	-

□ 연차별 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	400	-	-	100	100	200	-	-
국비	280	-	-	70	70	140	-	-
도비	36	-	-	9	9	18	-	-
군비	84	-	-	21	21	42	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
어린이 놀이마당 조성	소계	400	200	-	-	100	-	100	200	200	-
	국비	280	140	-	-	70	-	70	140	140	-
	도비	36	18	-	-	9	-	9	18	18	-
	군비	84	42	-	-	21	-	21	42	42	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 시천면 농촌중심지활성화사업 내 포함된 사업으로 기본계획 및 시행계획 등 절차이행에 따른 시일이 소요되며, 조속한 절차이행을 통한 사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ 시행계획 수립	: 2025.  1월

❍ 공사 착공	: 2025.  2월

❍ 공사 준공	: 2025.  6월

❍ 공사 준공	: 2025.  6월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 권영빈, 7334)
	3-2
추진실적 (기준일)	10%(정상추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2025년 6월
			목표달성여부	여

어린이 놀이마당 조성

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 1. ~ 2025. 6월

❍ 위       치: 산청군 시천면 사리 일원

❍ 총 소요예산: 400백만원(국비 280, 도비 36, 군비 84)

❍ 사 업 내 용: 어린이 놀이마당 조성(524㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 기본계획수립 착수 및 완료                    : 2022.  7. ~ 2023. 8월

❍ 시행계획수립 착수                            : 2023.  9.

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
400	400	400	200	140	18	42	-	200	140	18	42	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	400	-	-	100	100	200	-	-
국비	280	-	-	70	70	140	-	-
도비	36	-	-	9	9	18	-	-
군비	84	-	-	21	21	42	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
어린이 놀이마당 조성	소계	200	-	-	-	100	-	100	-
	국비	140	-	-	-	70	-	70	-
	도비	18	-	-	-	9	-	9	-
	군비	42	-	-	-	21	-	21	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 시천면 농촌중심지활성화사업 내 포함된 사업으로 기본계획 및 시행계획 등 절차 이행에 따른 시일이 소요되며, 조속한 절차 이행을 통한 사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ 시행계획 수립                                             : 2024.  9월

❍ 공사 착공                                                 : 2024. 10월

❍ 공사 준공                                                 : 2025.  6월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 권영빈, 7334)
	3-2
추진실적	10% (정상추진)		완료예상	2025년 6월
			목표달성여부	여

어린이 놀이마당 조성

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 1. ~ 2025. 6월

❍ 위       치: 산청군 시천면 사리 일원

❍ 총 소요예산: 400백만원(국비 280, 도비 36, 군비 84)

❍ 사 업 내 용: 어린이 놀이마당 조성(524㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 기본계획수립 착수 및 완료                    : 2022.  7. ~ 2023. 8월

❍ 시행계획수립 착수                            : 2023.  9.

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
400	400	400	200	140	18	42	-	200	140	18	42	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	400	-	-	100	100	200	-	-
국비	280	-	-	70	70	140	-	-
도비	36	-	-	9	9	18	-	-
군비	84	-	-	21	21	42	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
어린이 놀이마당 조성	소계	200	-	-	-	100	-	100	-
	국비	140	-	-	-	70	-	70	-
	도비	18	-	-	-	9	-	9	-
	군비	42	-	-	-	21	-	21	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 시천면 농촌중심지활성화사업 내 포함된 사업으로 기본계획 및 시행계획 등 절차이행에 따른 시일이 소요되며, 조속한 절차이행을 통한 사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ 시행계획 수립                                 : 2024.  9월

❍ 공사 착공                                     : 2024. 10월

❍ 공사 준공                                     : 2025.  6월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 김영옥)
	3-2
추진실적	5% (정상추진)		완료예상	2025년 6월
			목표달성여부	여

어린이 놀이마당 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 6월

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 일원

❍ 소요예산 : 400백만원(국비 280, 도비 36, 군비 84)

❍ 사업내용 : 어린이 놀이마당 조성, 주차 공간 조성 및 휴게시설물 설치 등

□ 추진사항

❍ 공모사업 선정                                           : 2021.  6월

❍ 기본계획 수립 착수                                      : 2022.  7월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	400		100	100	200
국비	280		70	70	140
도비	36		9	9	18
군비	84		21	21	42
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 시천면 농촌중심지활성화사업 내 포함된 사업으로 기본계획 및 시행계획 등

절차 이행에 따른 시일이 소요되며 조속한 절차 이행을 통해 사업을 추진

□ 향후 추진계획

❍ 기본계획 수립 완료                                       : 2023.  7월

❍ 시행계획 수립 완료                                       : 2024.  8월

❍ 공사 착공                                                : 2024. 10월

❍ 공사 준공                                                : 2025.  6월