구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 박성진, 6404)
	3-3
추진실적 (기준일)	30% (정상추진) (2026. 1월 기준)		완료예상	2027년 12월
			목표달성여부	추진중

산청군 행복문화센터 건립

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 10. ~ 2027. 12월

❍ 위       치: 산청군 산청읍 지리 327-4번지 일원

❍ 총 소요예산: 6,400백만원(국비(특교세) 900, 도비 2,750, 군비 2,750)

❍ 사 업 내 용: 행복문화센터 1동 건립(지상 3층, 건축연면적 1,410㎡ 정도)

□ 주요 추진사항

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 승인	: 2022. 10. ~ 12월

❍ 산청군 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투자심사	: 2022. 12. ~ 2023. 2월

❍ 건축 기획용역 및 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 실시	: 2023.  3. ~ 7월

❍ 3단계 경상남도 지역균형발전사업 선정	: 2023.  7월

❍ 공유재산관리계획 변경 승인	: 2023. 10월

❍ 도 공공건축지원센터 사업계획 재심사	: 2024.  1. ~ 2월

❍ 2025년 지방소멸대응기금 공모사업 신청	: 2024.  2월

❍ (군)공공건축심의윈원회 심의	: 2024.  5월

❍ 건축 설계공모 실시	: 2024. 11. ~ 2025. 1월

❍ 기본 및 실시설계 용역 시행	: 2025.  2월 ~

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
6,000	6,400	6,400	6,400	900	2,750	2,750	-	6,400	900	2,750	2,750	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	6,400	-	-	-	400	-	6,000	-
국비	900	-	-	-	-	-	900	-
도비	2,750	-	-	-	-	-	2,750	-
군비	2,750	-	-	-	400	-	2,350	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025		2026
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청군 행복문화센터 건립	소계	6,400	248	-	-	-	-	400	20	2,900	228	3,100	-
	국비	900	1.3	-	-	-	-	-	-	900	1.3	-	-
	도비	2,750	6.7	-	-	-	-	-	-	1,000	6.7	1,750	-
	군비	2,750	240	-	-	-	-	400	20	1,000	220	1,350	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 행복문화센터 건립사업의 추진 방향이 부지 여건, 민간부지 보상협의 등 외부 변수에 따라 조정될 가능성이 있음.

⇒ 기본 및 실시설계 변경 후 용역 재개

□ 향후 추진계획

❍ 실시설계 용역 시행	: 2025. 2. ~ 2026. 6월

❍ 경상남도 2단계 조건부 지방재정투자 심사 실시	: 2026. 6월

❍ 산청문화원 별관 및 태학루 해체공사 실시	: 2026. 7. ~ 8월

❍ 공사 착공 및 준공	: 2026. 9. ~ 2027. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 이정훈, 6403)
	3-3
추진실적 (기준일)	25% (정상추진) (2025. 6월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	추진중

산청군 행복문화센터 건립

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 10. ~ 2025. 12월

- 변    경: 2022. 10. ~ 2026. 12월

- 변경사유: 설계공모 및 기타 사전행정절차 지연에 따른 사업기간 변경(연장)

❍ 위       치: 산청군 산청읍 지리 327-4번지 일원

❍ 총 소요예산: 6,400백만원(국비(특교세) 900, 도비 3,000, 군비 2,500)

❍ 사 업 내 용: 행복문화센터 1동 건립(지상 3층, 건축연면적 1,410㎡ 정도)

□ 주요 추진사항

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 승인	: 2022. 10. ~ 12월

❍ 산청군 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투자심사	: 2022. 12. ~ 2023. 2월

❍ 건축 기획용역 및 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 실시	: 2023.  3. ~ 7월

❍ 3단계 경상남도 지역균형발전사업 선정	: 2023.  7월

❍ 공유재산관리계획 변경 승인	: 2023. 10월

❍ 도 공공건축지원센터 사업계획 재심사	: 2024.  1. ~ 2월

❍ 2025년 지방소멸대응기금 공모사업 신청	: 2024.  2월

❍ (군)공공건축심의윈원회 심의	: 2024.  5월

❍ 건축 설계공모 실시	: 2024. 11. ~ 2025. 1월

❍ 기본 및 실시설계 용역 시행	: 2025.  2월 ~

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
6,000	6,400	6,400	3,300	900	1,000	1,400	-	3,300	900	1,000	1,400	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	6,400	-	-	-	400	6,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-
군비	3,400	-	-	-	400	3,000	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청군 행복문화센터 건립	소계	3,300	209	-	-	-	-	400	20	2,900	189
	국비	900	-	-	-	-	-	-	-	900	-
	도비	1,000	5	-	-	-	-	-	-	1,000	5
	군비	1,400	204	-	-	-	-	400	20	1,000	184
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 2025년 3단계 경상남도 지역균형발전사업 확정예산 3,000백만원 중
1,000백만원만 확보

⇒ 착공시 차수별 발주 실시 및 기타 재원 확보 방안 마련

□ 향후 추진계획

❍ 실시설계 용역 시행	: 2025. 2. ~ 7월

❍ 경상남도 2단계 조건부 지방재정투자 심사 실시	: 2025. 7월

❍ 산청문화원 별관 및 태학루 해체공사 실시	: 2025. 8. ~ 9월

❍ 공사 착공 및 준공	: 2025. 9. ~ 2026. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 강지훈, 6403)
	3-3
추진실적 (기준일)	25%(정상추진) (2025. 1월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

산청군 행복문화센터 건립

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 10. ~ 2025. 12월

- 변    경: 2022. 10. ~ 2026. 12월

- 변경사유: 설계공모 및 기타 사전행정절차 지연에 따른 사업기간 변경(연장)

❍ 위       치: 산청군 산청읍 지리 327-4번지 일원

❍ 총 소요예산: 6,400백만원(국비(특교세) 900, 도비 3,000, 군비 2,500)

❍ 사 업 내 용: 행복문화센터 1동 건립(지상 3층, 건축연면적 1,226㎡ 정도)

□ 주요 추진사항

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 승인	: 2022. 10. ~ 12월

❍ 산청군 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투자심사	: 2022. 12. ~ 2023. 2월

❍ 건축 기획용역 및 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 실시	: 2023.  3. ~ 7월

❍ 3단계 경상남도 지역균형발전사업 선정	: 2023.  7월

❍ 공유재산관리계획 변경 승인	: 2023. 10월

❍ 도 공공건축지원센터 사업계획 재심사	: 2024.  1. ~ 2월

❍ 2025년 지방소멸대응기금 공모사업 신청	: 2024.  2월

❍ (군)공공건축심의윈원회 심의	: 2024.  5월

❍ 공공용 건물 설계공모관리용역 실시	: 2024.  6. ~ 8월

❍ 건축 설계공모 실시	: 2024. 11. ~ 2025. 1월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
6,000	6,400	6,400	3,300	900	1,000	1,400	-	3,300	900	1,000	1,400	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	6,400	-	-	-	400	6,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-
군비	3,400	-	-	-	400	3,000	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청군 행복문화센터 건립	소계	3,300	20	-	-	-	-	400	20	2,900	-
	국비	900	-	-	-	-	-	-	-	900	-
	도비	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-
	군비	1,400	20	-	-	-	-	400	20	1,000	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2024. 12월 특별교부세 확보에 따라 2025년 제1회 추가경정 예산시 특별교부세 900백만원 편성 예정

□ 문제점 및 대책

❍ 2025년 3단계 경상남도 지역균형발전사업 확정예산 3,000백만원 중
1,000백만원만 확보

⇒ 착공시 차수별 발주 실시 및 기타 재원 확보 방안 마련

□ 향후 추진계획

❍ 설계공모 심사 개최	: 2025. 1. 15.

❍ 실시설계 용역 시행	: 2025. 2. ~ 7월

❍ 경상남도 2단계 조건부 지방재정투자 심사 실시	: 2025. 7월

❍ 공사 착공 및 준공	: 2025. 9. ~ 2026. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 강지훈, 6402)
	3-3
추진실적 (기준일)	25%(정상추진) (2024. 8. 28. 기준)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

산청군 행복문화센터 건립(변경)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 10. ~ 2025. 12월

❍ 위       치: 산청군 산청읍 지리 327-4번지 일원

❍ 총 소요예산: 6,400백만원(도비 3,000, 군비 3,400)

❍ 사 업 내 용: 행복문화센터 건립(지상 3층, 건축연면적 1,236㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 승인	: 2022. 10. ~ 12월

❍ 산청군 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투자심사	: 2022. 12. ~ 2023. 2월

❍ 건축 기획용역 및 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 실시	: 2023.  3. ~ 7월

❍ 3단계 경상남도 지역균형발전사업 선정	: 2023.  7월

❍ 공유재산관리계획 변경 승인	: 2023. 10월

❍ 경상남도 공공건축지원센터 사업계획 사전검토	: 2024.  2월

❍ 산청군 공공축심의위원회 심의	: 2024.  5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
6,000	6,400	6,400	400	-	-	400	-	400	-	400	-	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액			임기 내 투자 계획			임기 후
		21년 까지	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	6,400	-	-	-	400	6,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-
군비	3,400	-	-	-	400	3,000	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청군 행복문화센터 건립	소계	400	20	-	-	-	-	400	20
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	400	20	-	-	-	-	400	20
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 2025년 지역균형발전사업비 3,000백만원 전액 미교부시 예산 부족으로 차수공사 발주로 사업완료기간 지연 예상

→ 특별조정교부금 신청을 통해 재원 확보 노력

□ 향후 추진계획

❍ 산청 행복문화센터 건립사업 설계공모 실시 : 2024. 10월

❍ 실시설계 시행                            : 2024. 11월

❍ 경상남도 2단계 조건부 지방재정 투자심사  : 2025. 3월

❍ 공사 착공 및 준공                        : 2025. 3. ~ 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 임승혜, 6402)
	3-3
추진실적 (기준일)	20%(정상추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

산청군 행복문화센터 건립

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 10. ~ 2024. 12월

- 변경: 2022. 10. ~ 2025. 12월

- 변경사유: 부지변경(민간부지 보상 협의가 안됨)으로 인한 사전 행정절차 재이행 기간 소요

❍ 위       치: 산청군 산청읍 지리 327-4번지 일원

❍ 총 소요예산: 6,000백만원(도비 1,800, 군비 4,200)

❍ 사 업 내 용: 행복문화센터 건립(지상 3층, 건축연면적 1,226㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 승인	: 2022. 10. ~ 12월

❍ 산청군 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투자심사	: 2022. 12. ~ 2023. 2월

❍ 건축 기획용역 및 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 실시	: 2023.  3. ~ 7월

❍ 3단계 경상남도 지역균형발전사업 선정	: 2023.  7월

❍ 공유재산관리계획 변경 승인	: 2023. 10월

❍ 도 공공건축지원센터 사업계획 재심사	: 2024.  1. ~ 2월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
6,000	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	6,000	-	-	1,500	4,500	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,800	-	-	-	1,800	-	-	-
군비	4,200	-	-	1,500	2,700	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청군 행복문화센터 건립	합계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 당초 2024년 지방전환(이양)사업(도 문화예술과)으로 예산을 신청할 예정이었으나 지방비 부담 비율(3:7)이 높아서 지방비 부담 비율이 상대적으로 낮은 3단계 지역균형발전사업(도 균형발전단)으로 신청함.

❍ 2023년 7월 3단계 지역균형발전사업(도 균형발전단)이 확정되었으나 도 균형발전단에서는 특별회계 예산편성 범위 내에서 시군 선사업 집행률 점검 등을 통하여 순차적으로 예산을 지원한다고 하여 건축물 건립 시 준공 시기 지연 등 사업추진에 어려움이 있음.

⇒ 2025년 지방소멸대응기금 공모사업에 신청하여 사업 추진하고자 함.

(전략사업담당관-608호(2024. 1. 23.)와 관련)

□ 향후 추진계획

❍ 2025년 지방소멸대응기금 공모사업 신청 예정           : 2024. 2월

❍ (군)공공건축심의윈원회 심의                           : 2024. 3월

❍ 실시설계 용역비 확보(제1차 추경)                      : 2024. 5월

❍ 공공용 건물 설계공모 용역 실시                       : 2024. 6. ~ 8월

❍ 실시설계 용역 시행                                   : 2024. 9월

❍ 공사 착공 및 준공                                    : 2025. 3. ~ 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 민선아)
	3-3
추진실적	10% (정상추진)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

산청군 행복문화센터 건립

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 10. ~ 2024. 12월

❍ 위    치: 산청군 산청읍 지리 327-4번지 일원

❍ 소요예산: 60억원(도비 20, 군비 40)

* 2024년 지방전환(이양)사업 예산신청(20억) 예정

❍ 사업내용: 행복문화센터 건립(지상 3층, 건축연면적 1,188㎡)

층별	세부시설 설치계획	비고
지상 3층	공연장, 강의실 등(396㎡)
지상 2층	공연장, 공연 준비실, 무대장비 조작실 등(396㎡)
지상 1층	상설 전시실, 강의실 등(396㎡)

□ 추진사항

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 승인                 : 2022. 10. ~ 12월

❍ 지방재정투자심사                               : 2023. 2월

❍ 사업부지매입                                   : 2023. 5월

❍ 지방전환사업(1단계) 신청                       : 2023. 8월

❍ 산청문화원 별관 철거                           : 2023. 12월

❍ 문화센터 착공 및 준공                          : 2024. 1. ~ 12월

□ 연차별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	6,000		600	5,400
국비
도비	2,000			2,000
군비	4,000		600	3,400
기타

□ 향후 추진계획

❍ 2023년 2월 투자심사 통과 후 군비 확보 신청

❍ 2024년 지방전환(이양)사업 예산신청(20억)