구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산림보호담당 (담당자 이주환, 6912)
	5-6
추진실적 (기준일)	80% (정상추진) (2026. 1월 기준)		완료예상	2026년 3월
			목표달성여부	여

백두대간 생태축 복원사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 1월 ~ 2026. 3월

❍ 위       치: 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 일원

❍ 총 소요예산: 5,810백만원(국비 4,067 도비 523 군비 1,220)

❍ 사  업  량: 구조물설치 1개소(B=14m, L=50m), 식생기반토 성토, 자생식물 식재 등

❍ 사 업 내 용: 지리산과 웅석봉 군립공원의 생태계 연계성 회복 및 산림복원

□ 주요 추진사항

❍ 실시설계 심사 완료                           : 2022. 12월

❍ 시공업체 계약 체결	: 2023. 4월

❍ 건설사업 관리용역 계약 체결	: 2023. 11월

❍ 사면 안전성 검토 등 추진	: 2023. 12월 ~ 2024. 2월

❍ 설계변경(총괄분 1회, 1차분 1회)	: 2024. 11월

❍ 1차분 공사 준공 및 2차분 공사 계약	: 2024. 11월

❍ 1차분 감리 준공 및 2차분 감리 계약          : 2025.  6월

❍ 3차분 공사 발주                               : 2025. 11월

❍ 설계변경(총괄분 2회, 2차분 1회, 3차분 1회)	: 2025. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
5,810	5,810	5,810	5,810	4,067	523	1,220	-	5,810	4,067	523	1,220	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	5,810	-	1,249	2,850	1,180	531	-	-
국비	4,067	-	874	1,995	826	372	-	-
도비	523	-	112	257	106	48	-	-
군비	1,220	-	263	598	248	111	-	-
기타		-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산림 생태 복원	계	5,810	4,712	1,249	203	2,850	1,361	1,180	2,153	531	995
	국비	4,067	3,765	874	142	1,995	952	826	1,830	372	841
	도비	523	426	112	18	257	123	106	235	48	50
	군비	1,220	521	263	43	598	286	248	88	111	104
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 현장여건 및 기타사유 등으로 공사 추진율이 낮고 신속한 예산 집행이 어려움

□ 향후 추진계획

❍ 2차분·3차분 공사 준공 예정	: 2026. 3월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산림보호담당 (담당자 이주환, 6912)
	5-6
추진실적 (기준일)	55% (정상추진) (2025. 6월 기준)		완료예상	2026년 3월
			목표달성여부	여

백두대간 생태축 복원사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 1. ~ 2026. 3.

❍ 위       치: 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 일원

❍ 총 소요예산: 금5,810백만원(국비 4,067 도비 523 군비 1,220)

❍ 사  업  량: 구조물설치 1개소(B=14m, L=50m), 식생기반토 성토, 자생식물 식재 등

❍ 사 업 내 용: 지리산과 웅석봉 군립공원의 생태계 연계성 회복 및 산림복원

□ 주요 추진사항

❍ 시공업체 계약 체결	: 2023. 4월

❍ 건설사업 관리용역(책임감리) 계약 체결	: 2023. 11월

❍ 사면 안전성 검토 등 추진	: 2023. 12월 ~ 2024. 2월

❍ 설계변경(총괄분 1회, 1차분 1회)	: 2024. 11월

❍ 1차분 공사 준공 및 2차분 공사 발주	: 2024. 11월

❍ 1차분 감리 준공 및 2차분 감리 계약 체결	: 2025.  6월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
5,810	5,810	5,810	5,810	4,067	523	1,220	-	5,810	4,067	523	1,220	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	5,810	-	1,249	2,850	1,180	531	-	-
국비	4,067	-	874	1,995	826	372	-	-
도비	523	-	112	257	106	48	-	-
군비	1,220	-	263	598	248	111	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산림 생태 복원	소계	5,810	4,002	1,249	203	2,850	1,361	1,180	2,153	531	285
	국비	4,067	2,997	874	142	1,995	952	826	1,830	372	73
	도비	523	385	112	18	257	123	106	235	48	9
	군비	1,220	620	263	43	598	286	248	88	111	203
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 현장여건 및 기타사유 등으로 공사 추진율이 낮고 신속한 예산 집행이 어려움

⇢ 추가 인력 투입 및 시공 상 문제점 해결 등 방안 모색

□ 향후 추진계획

❍ 설계변경 예정(총괄분 및 2차분)	: 2025.  7월

❍ 3차분 공사 발주 예정	: 2025.  9월

❍ 전기공사 준공	: 2025. 11월

❍ 2차분·3차분 공사 동절기 중단 예정	: 2025. 12월

❍ 2차분·3차분 공사 및 감리 최종 준공	: 2026.  3월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산림보호담당 (담당자 이주환, 6912)
	5-6
추진실적 (기준일)	45%(정상추진) (2025. 1월 기준)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

백두대간 생태축 복원사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 1. ~ 2025. 12월

❍ 위       치: 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 일원

❍ 총 소요예산: 금5,810백만원(국비 4,067 도비 523 군비 1,220)

❍ 사  업  량: 구조물설치 1개소(B=14m, L=50m), 식생기반토 성토, 자생식물 식재 등

❍ 사 업 내 용: 지리산과 웅석봉 군립공원의 생태계 연계성 회복 및 산림복원

□ 주요 추진사항

❍ 시공업체 계약 체결	: 2023.  4월

❍ 건설사업 관리용역(책임감리) 계약 체결	: 2023. 11월

❍ 사면 안전성 검토 등 추진	: 2023. 12월 ~ 2024. 2월

❍ 설계변경(총괄분 1회, 1차분 1회)	: 2024. 11월

❍ 1차분 공사 준공 및 2차분 공사 발주	: 2024. 11월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
5,810	5,810	5,810	5,810	4,067	523	1,220	-	5,810	4,067	523	1,220	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	5,810	-	1,249	2,850	1,180	531	-	-
국비	4,067	-	874	1,995	826	372	-	-
도비	523	-	112	257	106	48	-	-
군비	1,220	-	263	598	248	111	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
백두대간 생태축 복원사업	소계	5,810	3,716	1,249	203	2,850	1,360	1,180	2,153	531	-
	국비	4,067	2,924	874	142	1,995	952	826	1,830	372	-
	도비	523	375	112	18	257	122	106	235	48	-
	군비	1,220	417	263	43	598	286	248	88	111	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-		-

□ 문제점 및 대책

❍ 현장여건 및 기타사유 등으로 공사 추진율이 낮고 신속한 예산 집행이 어려움

⇢ 추가 인력 투입 및 시공 상 문제점 해결 등 방안 모색 중

❍ 당초 설계도서 대로 진행 시 예산 부족에 따른 대책 마련 필요

⇢ 중앙부처 예산 추가 건의 및 군비 추경 또는 설계변경(감액) 검토 중

□ 향후 추진계획

❍ 2차분 공사 동절기 중단	: 2024. 12월 ~ 2025. 2월

❍ 2차분 감리 계약 체결	: 2025.  4월

❍ 설계변경(총괄분 및 2차분)	: 2025.  7월

❍ 전기공사 준공	: 2025. 10월

❍ 2차분 공사 및 감리 준공	: 2025. 11월 ~ 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산림보호담당 (이주환, 6912)
	5-6
추진실적 (기준일)	30%(정상추진) (2024. 8. 28. 기준)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

백두대간 생태축 복원사업(변경)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 1. ~ 2025. 12월

❍ 위       치: 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 일원

❍ 총 소요예산: 금5,810백만원(국비 4,067 도비 523 군비 1,220)

❍ 사  업  량: 구조물설치 1개소(B=14m, L=50m), 식생기반토 성토, 자생식물 식재 등

❍ 사 업 내 용: 지리산과 웅석봉 군립공원의 생태계 연계성 회복 및 산림복원

□ 주요 추진 사항

❍ 시공단계의 건설사업 관리계획 승인             : 2023. 3.

❍ 시공업체 계약 체결                            : 2023. 4.

❍ 건설사업 관리용역(책임감리) 계약 체결          : 2023. 11.

❍ 사면 안전성 검토 등 추진                      : 2023. 12. ~ 2024. 2.

❍ 1차분 공사기간 연장                           : 2024. 4.

❍ 실정보고 승인 및 2차 공사기간(전체,1차분) 연장 : 2024. 8.

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
5,810	5,810	5,810	5,279	3,695	475	1,109	-	5,279	3,695	475	1,109	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액			임기 내 투자 계획			임기 후
		21년 까지	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	5,810	-	1,249	2,850	1,180	531	-	-
국비	4,067	-	874	1,995	826	372	-	-
도비	523	-	112	256	106	49	-	-
군비	1,220	-	263	599	248	110	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
백두대간 생태축 복원사업	소계	5,279	1,740	1,249	203	2,850	1,360	1,180	623
	국비	3,695	1,218	874	142	1,995	952	826	436
	도비	475	156	112	18	257	122	106	56
	군비	1,109	366	263	43	598	286	248	131
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 당초 설계에 반영되지 않은 실정 보고에 따른 예산 부족 예상

- 경상남도 및 산림청에 추가 예산 요청

□ 향후 추진계획

❍ 1차분 공사 준공                             : 2024. 11.

❍ 2차분 공사 계약                             : 2024. 11. ~ 12.

❍ 2차분 감리 계약                             : 2025. 4. ~ 5.

❍ 2차분 공사 및 감리 준공 예정                : 2025. 11. ~ 12.

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산림보호담당 (유보현, 6911)
	5-6
추진실적 (기준일)	30%(정상추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2025년 8월
			목표달성여부	여

백두대간 생태축 복원사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12월

- 변경: 2022. 1. ~ 2025. 8월

- 변경사유: 사전 행정절차 진행

❍ 위       치: 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 일원

❍ 총 소요예산: 금5,810백만원(국비 4,067 도비 523 군비 1,220)

❍ 사  업  량: 구조물설치 1개소(B=14m, L=50m), 식생기반토 성토, 자생식물 식재 등

❍ 사 업 내 용: 지리산과 웅석봉 군립공원의 생태계 연계성 회복 및 산림복원

□ 주요 추진 사항

❍ 시공단계의 건설사업 관리계획 승인             : 2023. 3월

❍ 시공업체 계약 체결                            : 2023. 4월

❍ 건설사업 관리용역(책임감리) 계약 체결          : 2023. 11월

❍ 사면 안전성 검토 등 추진                      : 2023. 12월 ~ 2024. 2월

❍ 1차분 공사기간 연장                           : 2024. 4월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
5,810	5,810	5,810	5,279	3,695	475	1,109	-	5,279	3,695	475	1,109	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	5,810	-	1249	2,850	1,711	-	-	-
국비	4,067	-	874	1,995	1198	-	-	-
도비	523	-	112	256	155	-	-	-
군비	1,220	-	263	599	358	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
백두대간 생태축 복원사업	소계	5,279	1,740	1,249	203	2,850	1,360	1,180	177
	국비	3,695	1,218	874	142	1,995	952	826	124
	도비	475	156	112	18	257	122	106	16
	군비	1,109	366	263	43	598	286	248	37
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 성토 반입 대상지 당초 계획과 변경되어 추가 확보에 어려움이 있었으나 부리지구 및 공법 변경으로 발생된 현장내 유용토 재 활용 등으로 확보하여 사업 추진코자함

❍ 사업대상지인 밤머리재 정상부 통제로 인한 등산객 및 관광객들의 불편이 있어 안내 플랭카드 추가 설치로 민원 및 안전사고 예방 노력

□ 향후 추진계획

❍ 1차분 공사 준공                             : 2024. 11월 ~ 12월

❍ 2차분 공사 발주                             : 2024. 11월 ~ 12월

❍ 공사 및 감리 준공                           : 2025.  8월 ~ 10월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산림보호담당 (유보현, 6911)
	5-6
추진실적	30% (정상추진)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

백두대간 생태축 복원사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 1. ~ 2024. 12월

- 변경: 2022. 1. ~ 2025. 12월

- 변경사유: 사전 행정절차 진행

❍ 위       치: 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 일원

❍ 총 소요예산: 금5,810백만원(국비 4,067 도비 523 군비 1,220)

❍ 사  업  량: 구조물설치 1개소(B=14m, L=50m), 식생기반토 성토, 자생식물 식재 등

❍ 사 업 내 용: 지리산과 웅석봉 군립공원의 생태계 연계성 회복 및 산림복원

□ 주요 추진 사항

❍ 실시설계 및 계약 심사 완료                    : 2022. 12월

❍ 시공단계의 건설사업 관리계획 승인             : 2023.  3월

❍ 시공업체 계약체결                             : 2023.  4월

❍ 책임감리 업체 계약체결                        : 2023. 11월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
5,810	5,810	5,810	5,279	3,695	475	1,109	-	5,279	3,695	475	1,109	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	5,810	-	1,249	2,850	1,711	-	-	-
국비	4,067	-	874	1,995	1198	-	-	-
도비	523	-	112	256	155	-	-	-
군비	1,220	-	263	599	358	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
백두대간 생태축 복원사업	소계	5,279	1,563	1,249	203	2,850	1,360	1,180	-
	국비	3,695	1,094	874	142	1,995	952	826	-
	도비	475	140	112	18	257	122	106	-
	군비	1,109	329	263	43	598	286	248	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 기존 설계도면대로 현장 시공이 어려워 본격적인 공사 진행에 차질 발생

- 최대한 빠른 시일 내 설계 변경 추진 및 검토 예정

❍ 시공 변경에 따른 공기 및 예산 부족 발생 예상

- 이월예산 우선 집행 및 부족한 예산은 당초 계획된 당해예산을 미리 집행하고 부족한 공기는 주말 작업 시행도 고려

□ 향후 추진계획

❍ 1차분 공사 완료 및 정산                       : 2024. 11월

❍ 잔액분 공사 발주 및 계약 체결                 : 2024. 12월

❍ 공사 및 감리 준공·정산                       : 2025. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산림보호담당 (담당자 유보현)
	5-6
추진실적	20% (정상추진)		완료예상	2024년
			목표달성여부	여

백두대간 생태축복원사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 일원

❍ 소요예산 : 금5,810백만원(국비 4,067 도비 523 군비 1,220)

❍ 사업내용 : 지리산과 웅석봉 군립공원의 생태계 연계성 회복 및 산림복원

❍ 사 업 량 : 구조물설치 1개소(B=14m, L=50m), 식생기반토 성토, 자생식물 식재 등

□ 추진사항 및 향후계획

❍ 사업추진을 위한 타당성 평가 완료             : 2021. 8월

❍ 실시설계 및 안전성검토 용역 완료             : 2022. 10. ~ 12월

❍ 계약심사 완료                                : 2022. 12월

❍ 해당 인허가(산지,도로 등) 협의                : 2023. 1. ∼ 6월

❍ 생태축 복원사업 추진사업 감리선정            : 2023. 1. ∼ 6월

❍ 생태축 복원사업 추진사업(1차·2차분) 발주예정 : 2023. 7월 ~

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	5,810	1,249	2,850	1,711
국비	4,067	874	1,995	1,198
도비	523	112	257	154
군비	1,220	263	598	359
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 공사기간 밤머리재 교통 통제로 인한 민원발생 우려

- 밤머리재터널(지리산터널) 개통과 사업홍보를 통한 주민불편 최소화

□ 향후 추진계획

❍ 시공전 건설사업관리계획 수립 및 승인               : 2023. 1. ~ 3월

❍ 해당 인·허가 절차 진행                            : 2023. 1. ~ 3월

❍ 건설사업 관리용역 계약심사 및 용역업체 선정 등     : 2023. 4. ~ 6월

❍ 백두대간생태축 복원사업(1차·2차분) 입찰 및 발주 등 : 2023.  7월

❍ 백두대간생태축 복원사업(1차·2차분) 준공 및 정산 등 : 2023. 12월