새로운 변화, 모두가 행복한 산청

민선8기 공약사업 추진상황

■ 민선8기 공약사업 추진상황(총 57건)

- 완료 3, 정산추진 50, 장기추진 4

구 분	추 진 실 적						비고
	계	완료	이행 후 계속추진	정상추진	장기추진	기타
군 수 공 약 사 업	57	3		50	4

`	산 청 군
	(기획조정실)

목    차

Ⅰ		총 괄

❍ 민선8기 공약사업 및 주요 시책사업 추진상황	1

Ⅱ		부 서 별

【기획조정실 - 1건】

ㆍ 지방소멸대응기금 확보 및 대책 사업 추진(공약)	3

【경제교통과 - 7건】

ㆍ 읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)(공약)	4

ㆍ 사회적기업, 마을기업 창업지원(공약)	5

ㆍ 전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축(공약)	6

ㆍ 브라보 한방택시 운영 확대와 개선(공약)	7

ㆍ 지역특화 마을기업 신활력 일자리 육성(공약)	8

ㆍ 단계시장 활성화 방안 마련(공약)	9

ㆍ 산청시장 주상복합 신축(공약)	10

【안전총괄과 - 3건】

ㆍ 무선 공공 인터넷망 구축사업(공약)	11

ㆍ 방범 cctv 설치 사업(공약)	12

ㆍ 취락마을 방송용 스피커 설치(공약)	13

【건설과 – 1건】

ㆍ 원지교차로 개선사업(공약)	14

【지역발전과 - 5건】

ㆍ 도시재생 뉴딜사업(옥산지구)(공약)	15

ㆍ 대형아파트 유치(공약)	16

ㆍ 농산어촌 주거플랫폼 사업(공약)	17

ㆍ 농촌공간(모례지역 돈사철거) 정비사업(공약)	18

ㆍ 어린이 놀이마당 조성(공약)	19

【한방항노화과 - 2건】

ㆍ 산청형 한방약초 생산기반 및 유통시스템 개선(공약)	20

ㆍ 동의보감촌 지속가능한 운영체계 구축(공약)	22

【문화체육과 - 3건】

ㆍ 산청군 행복문화센터 건립(공약)	23

ㆍ 한국선비문화연구원 활성화 지원(공약)	24

ㆍ 공공체육시설 확충(공약)	25

【관광진흥과 - 6건】

ㆍ 대원사 계곡길 연장(공약)	27

ㆍ 밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축(공약)	28

ㆍ 중산관광지 활성화 사업(공약)	29

ㆍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업(공약)	30

ㆍ 남사예담촌 홍보 지원 및 관광 활성화(공약)	31

ㆍ 생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성(공약)	33

【산림녹지과 - 4건】

ㆍ 군유림 밀원 식물단지 조성(공약)	34

ㆍ 백두대간 생태축 복원사업(공약)	35

ㆍ 산림 신품종 재배단지 조성(공약)	37

ㆍ 둔철 산림생태인프라 구축사업(공약)	38

【주민복지과 - 1건】

ㆍ 사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원(공약)	39

【복지지원과 - 4건】

ㆍ 산청군 장애인회관 신축(공약)	40

ㆍ 다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원(공약)	41

ㆍ 성폭력 전문상담소 운영(공약)	42

ㆍ 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진(공약)	43

【환경위생과 - 1건】

ㆍ 생초 민물 먹거리타운 명품화 사업 지원(공약)	44

【상하수도과 - 2건】

ㆍ 상수도 시설 확충(공약)	45

ㆍ 공공하수처리시설 설치사업(공약)	47

【보건정책과 - 1건】

ㆍ 내과 전문의 채용 추진(공약)	48

【건강관리과 - 2건】

ㆍ 감염병 선제적 방역 시스템 확충(공약)	49

ㆍ 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 사업(공약)	50

【농축산과 - 9건】

ㆍ 농업보조금 확대 지급(공약)	51

ㆍ 청년 농업인, 귀농·귀촌 지원사업 확대(공약)	52

ㆍ 농촌인력 중개센터 운영(공약)	53

ㆍ 친환경 농업 인프라 확충 및 지원(공약)	54

ㆍ 직불금 확대(공약)	55

ㆍ 흑돼지 명품화 사업 지속 확대(공약)	56

ㆍ 유기축산 한우단지 확대(공약)	57

ㆍ 흑돼지 축제 개최(공약)	58

ㆍ 함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전(공약)	59

【농업진흥과 - 4건】

ㆍ 기후변화에 대비한 전략 재배작물 육성(공약)	60

ㆍ 고품질 산청사과 명품화 지원(공약)	61

ㆍ 고소득 작물 스마트 4차산업 지원(공약)	62

ㆍ 스마트팜 청년창업 교육 시설 운영(공약)	63

【농식품유통과 - 1건】

ㆍ 산청군 먹거리통합지원센터 건립(공약)	64

민선8기 공약사업 추진상황

관리 번호	담 당 실 과	구분	사 업 명	추진상황
				완료	이행 후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계			공약 57건	3		50	4
1	기획조정실	공약	지방소멸대응기금 확보 및 대책 사업 추진			●
2	경제교통과	공약	읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)				●
3	경제교통과	공약	사회적기업, 마을기업 창업지원			●
4	경제교통과	공약	전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축			●
5	경제교통과	공약	브라보 한방택시 운영 확대와 개선			●
6	경제교통과	공약	지역특화 마을기업 신활력 일자리 육성			●
7	경제교통과	공약	단계시장 활성화 방안 마련			●
8	경제교통과	공약	산청시장 주상복합 신축				●
9	안전총괄과	공약	무선 공공 인터넷망 구축사업			●
10	안전총괄과	공약	방범 cctv 설치 사업			●
11	안전총괄과	공약	취락마을 방송용 스피커 설치			●
12	건설과	공약	원지교차로 개선사업			●
13	지역발전과	공약	도시재생 사업(옥산지구)				●
14	지역발전과	공약	대형아파트 유치			●
15	지역발전과	공약	농산어촌 주거플랫폼 사업			●
16	지역발전과	공약	농촌공간(모례지역 돈사철거) 정비사업			●
17	지역발전과	공약	어린이 놀이마당 조성			●
18	한방항노화과	공약	산청형 한방약초 생산기반 및 유통시스템 개선			●
19	한방항노화과	공약	동의보감촌 지속가능한 운영체계 구축			●
20	문화체육과	공약	산청군 행복문화센터 건립			●
21	문화체육과	공약	한국선비문화연구원 활성화 지원			●
22	문화체육과	공약	공공체육시설 확충			●
23	관광진흥과	공약	대원사 계곡길 연장			●
24	관광진흥과	공약	밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축			●
25	관광진흥과	공약	중산관광지 활성화 사업			●
26	관광진흥과	공약	황매산 관광객 편의안전시설 조성사업			●
27	관광진흥과	공약	남사예담촌 홍보 지원 및 관광 활성화			●
28	관광진흥과	공약	생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성			●
29	산림녹지과	공약	군유림 밀원 식물단지 조성			●
30	산림녹지과	공약	백두대간 생태축 복원사업			●
31	산림녹지과	공약	산림 신품종 재배단지 조성			●
32	산림녹지과	공약	둔철 산림생태인프라 구축사업			●
33	주민복지과	공약	사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원	●
34	복지지원과	공약	산청군 장애인회관 신축			●
35	복지지원과	공약	다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원			●
36	복지지원과	공약	성폭력 전문상담소 운영			●
37	복지지원과	공약	산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진			●
38	환경위생과	공약	생초 민물 먹거리타운 명품화 사업 지원			●
39	상하수도과	공약	상수도 시설 확충			●
40	상하수도과	공약	공공하수처리시설 설치사업			●
41	보건정책과	공약	내과 전문의 채용 추진	●
42	건강관리과	공약	감염병 선제적 방역 시스템 확충			●
43	건강관리과	공약	노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 사업			●
44	농축산과	공약	농업보조금 확대 지급			●
45	농축산과	공약	청년 농업인, 귀농·귀촌 지원사업 확대			●
46	농축산과	공약	농촌인력 중개센터 운영	●
47	농축산과	공약	친환경 농업 인프라 확충 및 지원			●
48	농축산과	공약	직불금 확대			●
49	농축산과	공약	흑돼지 명품화 사업 지속 확대			●
50	농축산과	공약	유기축산 한우단지 확대			●
51	농축산과	공약	흑돼지 축제 개최			●
52	농축산과	공약	함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전				●
53	농업진흥과	공약	기후변화에 대비한 전략 재재작물 육성			●
54	농업진흥과	공약	고품질 산청사과 명품화 지원			●
55	농업진흥과	공약	고소득 작물 스마트 4차산업 지원			●
56	농업진흥과	공약	스마트팜 청년창업 교육 시설 운영			●
57	농식품유통과	공약	산청군 먹거리통합지원센터 건립			●

구 분	공약사업
담당부서	기획조정실(인구정책담당)
추진진도(%)	25%

1

지방소멸대응기금 확보 및 대책 사업 추진

❍ 지역 인구감소에 따른 지방소멸 위기에 대비하여 지방소멸대응기금을 확보 후 우리 군에 적합한 사업을 발굴·추진하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금52,800백만원(기금)  ※ 2023년 예산: 금9,600백만원(기금)

❍ 사 업 량 : 매촌지구 도시개발사업 외 6개 사업

- 매촌지구 도시개발사업	- 늘비 예술 창작센터 건립
- 산엔청 청년 베이스캠프 조성	지리산 산청 곶감 홍보판매장 건립
- 경호강 100리길 자전거 도로 개설	전통시장 소방 안전체계 구축
- 의료조합 찾아가는 마을 주치의 사업

❍ 사업내용

□ 그간 추진사항

❍ 2023년 지방소멸대응기금 확보 – B등급, 96억(7개사업)	: 2022. 7월
❍ 산청군 인구감소대응에 관한 조례 제정	: 2023. 4월
❍ 인구감소대응 5개년 기본계획 및 2023년 시행계획 수립	: 2023. 5월
❍ 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 수립	: 2023. 6월

□ 문제점 및 대책

(문제점)

❍ 인구감소에 대응하기 위한 기금 예산이 균등 배분이 아닌 지역별 평가에 따른 차등 배분으로 상위권 평가등급을 위한 예산확보 사업에 집중되어 지역소멸 위기에 대비할 우리 군 여건에 적합한 실질적 사업발굴이 어려운 실정

❍  진행중인 기금사업의 경우 토지보상 협의 애로, 행정절차 이행에 따른 기간 소요 등의 사유로 집행실적 저조 및 사업추진 장기화 우려

(대책)

❍ 인구정책위원회, 컨설팅, 주민설문조사, 포럼 등을 통해 인구정책의 기본방향과 추진목표에 부합하는 우리 군에 적합한 사업 발굴 추진

❍ 집행 부진 사업은 세부계획을 지속적으로 점검⋅관리 및 지연되는 장기 사업에 대해서는 유기적 협조 체제를 통해 조기 이행 적극 추진 당부

□ 향후 추진계획

❍ 평 가	: 서면검토(7월), 현장방문(8월), 대면평가(9월), 종합평가(10월)
※ 평가배분금액 : S등급 144억, A등급 112억, B등급 80억, C등급 64억

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(교통정책담당)
추진진도(%)	30%

2

읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)

○ 읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)를 위한 주차장 확충으로

군민의 불편 해소 및 교통복지 서비스 확대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 읍∙면 소재지 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금7,433백만원

❍ 단기사업【산청시장 주변 공영주차장 조성사업(국토교통부 주차환경개선사업)】

- 사업위치 : 산청군 산청읍 산청리 237외 6필지

- 사 업 비 : 금4,433백만원(균특 1,741, 군비 2,692)

- 사업내용 : 공영주차장 조성 1식(A=2,714㎡)

❍ 장기사업

- 중앙 및 도의 각종 지원사업 공모 신청 등을 통해 국·도비를 확보하여 소재지권 주차장 확충 방안 강구

- 타 부서와의 긴밀한 협조체계 구축 및 공공사업 추진과 연계하여 주차장 확충
(예: 건설과의 마을별 다목적광장 조성사업)

□ 주차장 조성 현황(2022. 12월 기준)                (단위 : 대, 개소, 면)

구 분	자동차 등록대수	주차장 종류별				주차장 확보율
		계	노상주차장	노외주차장	부설주차장
개소	21,870	928	17	180	731
면수		9,812	387	5,468	3,957	44.86%

□ 추진사항

❍ 지방재정투자심사, 공유재산 관리계획 심의	: 2021. 1. ~ 2월

❍ 토지소유자 보상 협의(16회) 및 보상 완료	: 2022. 10월

❍ 토지세입자 보상 협의 및 보상 완료	: 2023.  3월

❍ 주차장 조성을 위한 지장물 철거 공사, 폐기물 처리 용역 등 완료 : 2023.  6월

□ 문제점 및 대책

❍ 산청시장 주변 공영주차장 조성사업의 경우 기존 주차장, 가로등, 녹지

공간 등을 확충하기 위한 추가 재원 확보 필요

❍ 읍면 소재지권의 주차장 조성에 따른 많은 사업비 투입 예상 → 중앙

정부 및 도의 각종 공모사업 신청 등을 통해 재원 확보 추진

□ 향후 추진계획

❍ 산청시장 주차장 조성사업 추가 예산 반영 : 2023년 제2회 추경

❍ 중앙정부와 도의 공모사업 및 자체 공공사업 등을 통한 주차장 확충율 제고

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(일자리창출담당)
추진진도(%)	30%

3

사회적기업 및 마을기업 창업지원

○ 우리군의 지역자원을 활용하면서 일자리 등 사회문제를 해결하는 (예비)사회적기업 및 마을기업 육성을 위하여 창업 비용의 일부를 지원

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 산청군 관내 소재 (예비)사회적기업, 마을기업

❍ 총 소요예산 : 금270백만원(군비) ※ 2023년 60백만원

❍ 사 업 량 : 총 6개소(연간 2개소×3개년)

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2025년(3년간)

❍ 사업내용 : 창업시 소요되는 비용 중 30백만원 범위내 지원

- 리모델링비, 사업개발비, 홍보비, 재료비, 포장박스비, 교육훈련비 등

❍ 지원절차 : 모집공고 → 접수 → 위원회 심의·선정 → 사업시행 → 정산

□ 추진사항

❍ 계획수립[3개년 사업]	: 2022. 7월

❍ 2023년 사업대상 모집공고	: 2023. 2월

❍ 2023년 사업대상 선정 및 시행(사회적기업 2개소)     : 2023. 3월

※ 사회적기업 2개소: 엔티코리아, 신풍영농조합법인

□ 문제점 및 대책

❍ 기존 업종 및 분야와 중복되지 않는 새로운 기업 발굴 애로

❍ 지역경제 일자리 창출로 연계되도록 활용방안 강구 필요함

□ 향후 추진계획

❍ 사업완료에 따른 보조금 정산	: 2023. 11월

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(지역경제담당)
추진진도(%)	70%

4

전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축

○ 장보기, 라이브커머스 행사 등의 경제 플랫폼 구축을 통해 코로나19 장기화 및 경기침체로 약화된 전통시장을 활성화하여 지역경제 발전에 기여하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 전통시장 일원

❍ 총 소요예산 : 금243백만원(군비) ※ 2023년 금105백만원(도비 8, 군비 97)

❍ 사 업 량 : 산청군 전통시장 6개소

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년(4년간)

❍ 사업내용 : 전통시장 소비촉진 도모 행사(장보기 행사, 온누리상품권 환급,                   소비촉진 이벤트 등)

□ 추진사항

❍ 설날 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사    : 2023. 1월

❍ 봄철 온누리상품권 환급행사	: 2023. 3월

❍ 모바일 산청사랑상품권 경품행사(1차)             : 2023. 5월

❍ 전통시장 장날 공연행사	: 2023. 5. 1. ~ 10.

❍ 봄맞이 전통시장 라이브커머스 추진	: 2023. 5. 1. ~ 10.

❍ 온/오프라인 프로모션을 통한 내수활성화 추진     : 2023. 6.20. ~ 7. 6.

❍ 전통시장 온누리상품권 환급행사	: 2023. 6월

❍ 모바일 산청사랑상품권 경품행사(2차)             : 2023. 8. 28. ~ 9. 11.

□ 문제점 및 대책

❍ 대형 마트 등의 영향으로 어려운 전통시장의 활성화를 위한 다양한 행사(환급, 경품 등) 필요

□ 향후 추진계획

❍ 모바일 산청사랑상품권 경품행사(3차)             : 2023. 9월

❍ 추석 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사	: 2023. 9월

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(교통정책담당)
추진진도(%)	80%

5

브라보 한방택시 운영 확대와 개선

개선차장 확보)

○ 브라보 한방택시 운행 대상마을 선정기준을 완화하여 마을주민의

이동권 보장을 확대하고 교통복지 증진 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

❍ 대상마을 : 산청군 전읍면 72개 마을(농어촌버스 미운행 마을)

❍ 운행구간 : 마을회관 ~ 생활권 소재지

❍ 총 소요예산 : 금2,680백만원(국비 1,280, 도비 640, 군비 760) ※ 2023년 520백만원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년(4년간)

❍ 사업내용 : 개인별 배부된 이용권으로 한방택시 이용

□ 추진사항

❍ 브라보 한방택시 최초 시행	: 2015.  1월

❍ 10개면 62개 마을 확대 추진	: 2019.  7월

❍ 임산부 한방택시 시행(인구정책사업 일환)	: 2021.  3월

❍ 한방택시 운행 대상마을 선정기준 완화	: 2022. 12월

- 마을회관~버스승강장 거리를 1㎞이상 → 0.7㎞이상으로 규정 개정 완화

❍ 대상마을 확대 추진 (6개마을 추가 승인)          : 2023. 1. ~ 8월

※ 추가 승인: 6개마을(차황 2, 금서 1, 시천 1, 신안 1, 생비량 1)

□ 문제점 및 대책

❍ 국·도비 감축 편성으로 예산확보 애로 → 군비 추가 편성 필요

□ 향후 추진계획

❍ 운영 확대와 개선을 위해 점차적으로 대상마을 선정기준을 완화하여       교통편의 수요에 적극 대응

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(일자리창출담당)
추진진도(%)	30%

6

지역특화 마을기업 신활력 일자리 육성

○ 대한민국 대표 우수 마을기업 모델링을 통한 지원으로 지역 자원을       활용한 수익사업으로 주민 소득과 일자리를 창출에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 경상남도, 행정안전부에서 지정한 마을기업(5개소)

❍ 총 소요예산 : 금150백만원(군비) ※ 2023년 50백만원

❍ 사 업 량 : 총 6개소(연간 2개소 × 3개년)

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2025년(3년간)

❍ 사업내용 : 25백만원 × 2개소

- (인건비) 1인당 연 2,400만원(월 200만원 한도, 자부담 10%이상) 지원

❍ 지원절차 : 모집공고 → 접수 → 위원회 심의·선정 → 사업시행

□ 추진사항

❍ 계획수립[3개년 사업]	: 2022. 7월

❍ 2023년 사업대상 모집공고	: 2023. 2월

❍ 2023년 사업대상 선정 및 시행(마을기업 2개소)      : 2023. 3월

※ 마을기업 2개소: 지리산대포마을영농조합법인, 농업회사법인 민들레푸드

□ 문제점 및 대책

❍ 기존 업종 및 분야와 중복되지 않는 새로운 마을기업 발굴 애로

❍ 영세한 소규모 마을기업으로 인력 채용에 어려움이 많음

□ 향후 추진계획

❍ 지속적인 사업장 관리 및 지도                     : 2023. 8. ~ 12월

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(지역경제담당)
추진진도(%)	20%

7

단계시장 활성화 방안 마련

○ 안전하고 쾌적한 시장환경 조성으로 이용객이 편리하게 접근할 수

있도록 함으로써 단계시장의 활성화 및 지역경제 발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신등면 단계시장 일원

❍ 총 소요예산 : 금2,641백만원(도비 576, 군비 2,065)

- 시설 현대화사업 : 960백만원(도비 576, 군비 384)

- 주차장 조성사업 등 : 1,681백만원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026(4년간)

❍ 사업내용 : 시설현대화사업(장옥 정비), 주차장 조성사업(A = 2,350㎡)

단계시장 활성화 사업(장보기, 페이백 행사 등)

□ 추진사항

❍ 주차장 대상지의 보상협의 및 감정평가 실시	: 2023. 1월 ~

❍ 시설현대화사업 실시설계 용역	: 2023. 4월

❍ 시설현대화사업 실시설계 용역 완료	: 2023. 6월

❍ 주차장 대상지 보상 협의 완료(5건)               : 2023. 8월

□ 문제점 및 대책

❍ 기존 장옥 철거 시 조성될 임시 장옥 이전으로 준공 완료 시까지 상인들의 사용 불편이 우려되므로 철거 후 신속한 공사가 진행되어야 함

□ 향후 추진계획

❍ 주차장 대상지 실시설계                       : 2023. 10월 ~

❍ 장옥 정비에 따른 임시 장옥 설치               : 2023. 11월

❍ 시설현대화사업 및 주차장 조성사업 착공 및 준공  : 2023. 11. ~ 2024. 4월

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(지역경제담당)
추진진도(%)	20%

8

산청시장 주상복합 신축

○ 「산청시장 주상복합 신축」사업 추진으로 노후화되고 경쟁력이 약화된 산청시장의 지역상권 활성화 및 부족한 주거 공간 확보

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리 산청시장 일원

❍ 사업기간 : 2022. 9월 ~

❍ 총 소요예산 : 금80,000백만원 ※ 총사업비 미정, 타당성 조사용역비 65백만원

❍ 사업내용 : 산청시장 주상복합 신축사업

□ 추진사항

❍ 추진계획 수립                                  : 2022.  7월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2022.  9월

❍ 추진위원회 구성	: 2022. 10월

❍ 타당성 조사 용역 과업기간 변경	: 2023.  3월

❍ 타당성 조사 용역 중간보고	: 2023.  4월

❍ 타당성 조사 용역 최종 보고회	: 2023.  7월

□ 문제점 및 대책

❍ 보상금, 건축비 등 사업비 과다 예상, 사업 시행방안 검토 필요

→ 민간투자, 국·도비 등 재원 조달 방안 모색

❍ 건축물, 토지 등 100명 이상의 소유자가 있으나 건축물대장, 등기사항증명서 등 공부 정리가 되어있지 않아 보상 등 향후 사업 추진이 어려움

→ 정비용역 시행으로 실소유자 확인 등 공부 정리 진행

□ 향후 추진계획

❍ 추진방향 설정 및 재원 조달 방안 모색	: 2024. 1월 ~

❍ 공부 정리 용역 시행                           : 2024. 1월 ~

구 분	공약사업
담당부서	안전총괄과(관제통신담당)
추진진도(%)	90%

9

무선 공공 인터넷망 구축사업

○ 동의보감촌 등 산청군 주요 관광지 및 다중이용시설에 무선 인터넷 서비스망을 구축하여 지역주민과 관광객들에게 편의 제공

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 내 주요 관광지 및 다중이용시설

❍ 총 소요예산 : 금120백만원(군비)

❍ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2023. 9.

❍ 사 업 량 : 동의보감촌 내 10개소

❍ 사업내용 : 사업 목적에 부합하는 주요 관광지를 선정하여 무선인터넷 연결장치	(AP) 등 인프라 구축 및 운영, 안내표지판 설치, 유지·보수 등 실시

□ 추진사항

❍ 엑스포 행사장 내 위치선정 및 현장조사       : 2023. 5월

❍ 세부사항 설계                               : 2023. 6월

□ 문제점 및 대책

❍ 공공와이파이 특성상 누구나 이용할 수 있으므로, 한꺼번에 많은 사용자가

접속할 경우 속도가 느려지고, 잦은 끊김이 생겨 사용자들의	불만 발생

→ 엑스포 행사장 내 인원이 많이 모일 것으로 예상되는 구역 고성능기기

설치 및 이전 설치

□ 향후 추진계획

❍ 동의보감촌 내 공공와이파이 10개소 설치     : 2023. 9월 중 완료

구 분	공약사업
담당부서	안전총괄과(관제통신담당)
추진진도(%)	80%

10

방범CCTV 설치사업

○ 농축산물 도난 등 지역에서 발생하는 각종 범죄 예방과 신속한 검거를      위하여 방범CCTV를 설치하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 상촌리 외 66개소

※ 범죄 해결 및 예방효과 극대화 할 수 있는 장소 우선 설치

❍ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026. 10월

❍ 총 소요예산 : 금1,583백만원

❍ 사업내용

- 신규 카메라 및 노후 카메라 교체

- 전용회선 및 자가망을 구성하여 관제센터와 연계

□ 추진사항

❍ 지능형CCTV 신규 4개소 4대)             : 2023. 6월 완료

❍ 노후 차량방범CCTV 교체(7개소 7대)      : 2023. 6월 완료

❍ 생활방범 신규 47대, 교체 7개소 7대      : 2023. 7월 완료

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

구 분	공약사업
담당부서	안전총괄과(자연재난담당)
추진진도(%)	25%

11

취락마을 방송용 스피커 설치

○ 집중호우 등 각종 재난으로부터 주민을 보호할 수 있는 환경 조성이

필요하며, 재난상황 등 신속한 전파로 재난의 선제적 대응 및 인명피해 예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 취락마을 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금800백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 40여개 취락마을 방송장비 설치 1식

- 40개마을 X 20백만원 = 800백만원

❍ 사업내용 : 가정용 마을 송□수신기 및 마을방송 송신기 설치

□ 추진사항

❍ 23년도 본예산 편성 요구 및 편성             : 2022.  9월

❍ 계약방법 검토 등 행정절차 이행              : 2023.  3월

❍ 구매계획 및 구축사업 시행                   : 2023. 4. ~ 5월

❍ 2023년 가정용 무선방송장치 구축사업 준공    : 2023.  9월

※ 산청1, 차황1, 오부2, 생초1, 금서1, 삼장1, 시천2, 단성1, 신안1, 생비량1, 신등1

□ 향후 추진계획

❍ 2024년도 본예산 편성 요구                   : 2023.  9월

❍ 연차별 가정용 무선방송장치 구축 추진         : 2024. 1. ~ 2026. 12월

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	25%

12

원지교차로 개선사업

○ 국도3호선 개통 이후 산청군 신안면 중촌리 구간을 이용하는 주민들이 진․출입 램프가 없어 도로를 우회하는 불편을 겪고 있어 교차로 개선이 시급함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 중촌리 일원

❍ 사 업 비 : 금1,800백만원(국비)

※ 시행처 : 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소(산청군 건의사업)

❍ 사 업 량 : 교차로 개선(진주방향) L=320.0m

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025년

□ 추진사항

❍ 국도3호선 산성교차로 개설건의(산청군→국토교통부)     : 2018. 11월

❍ 제6차(2018~2022년) 국도시설개량(병목지점) 사업 반영   : 2019.  4월

❍ 실시설계용역 착수 및 완료                           : 2020.  3월

❍ 사업추진 주민설명회 개최                            : 2020. 11월

❍ 사업착공                                            : 2023.  1월

□ 문제점 및 대책

❍ 편입부지에 대한 보상협의 및 행정절차 추진 시 조기 완료를 위하여 산청군 행정지원 계획

□ 향후 추진계획

❍ 사업준공                                            : 2025. 12월

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(도시재생담당)
추진진도(%)	10%

13

도시재생 사업(옥산지구)

○ 낡고 쇠퇴한 원도심의 주거 안정과 새로운 성장동력 확보

○ 주거환경 정비사업 외 도시를 재활성화 시켜 경쟁력을 높이는 도시혁신사업으로 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리·지리 일원

❍ 사업기간 : 2025 ~ 2028년

❍ 총 소요예산 : 금17,500백만원(국비 10,500, 도비 1,400, 군비 5,600)

❍ 사 업 량

- 산청시장 골목상권 활성화 및 약선생활문화 육성·지원

- 주거환경 개선 및 골목 정비, 주민 소득증대 사업 추진

□ 추진사항

❍ 2022년도 공모사업 추진(미선정)               : 2022. 12월

❍ 사업자 선정을 위한 절차 이행                : 2023.  6월

□ 문제점 및 대책

❍ 정부 정책 및 여건 변화에 따른 공모사업 대상 선정 및 예산 규모 축소

❍ 정부지침 변경(방재계획 수립 필수)에 따른 2024년 공모 추진 예정

□ 향후 추진계획

❍ 도시재생활성화계획 수립 용역 사업자 선정    : 2024.   1월

❍ 2024년도 공모사업 추진 및 재신청            : 2024.   9월

❍ 공모사업 결정                               : 2024.  12월

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(주택담당)
추진진도(%)	80%

14

대형아파트 유치

○ 도시의 난개발 방지와 체계적인 도시개발을 통한 쾌적한 정주환경 조성

○ 기반시설 확충으로 주민의 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 754-1번지 일원

❍ 사업기간 : 2019. 6. ~ 2024. 2월

❍ 총 소요예산 : 금18,900백만원(LH 11,200, 군 7,700)

❍ 사업내용

- 공공임대주택 : 1동(지하1층 지상12층), 82세대, 연면적 3999.96㎡

- 신안면사무소 : 1동(지상 3층), 연면적 993.87㎡

□ 추진사항

❍ 국토교통부 공모사업 선정                            : 2019.   6월

❍ 사업계획 승인                                       : 2020. 12월

❍ 공사 착공                                           : 2021.   7월

□ 문제점 및 대책

❍ 공공임대주택 건립 및 면사무소 재건축에 따른 주차 부족 예상

❍ 농촌중심지 활성화사업과 연계하여 주차장 확보 계획

□ 기대효과

❍ 공동주택 및 공공청사 준공                           : 2023. 11월

❍ 공공청사(신안면사무소) 입주                          : 2023. 12월

❍ 공동주택(공공임대주택) 입주                          : 2024.   2월

❍ 도시지역의 택지난을 해소하고 인구 유입 증대에 기여

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(농촌개발담당)
추진진도(%)	30%

15

농산어촌 주거플랫폼 사업

○ 모든 세대를 고려한 계층별 맞춤형 활동기반 구축으로 정주여건을

개선하고 중심지와 배후마을 간 문화복지 서비스 전달체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 소재지 내

❍ 총 소요예산 : 금16,000백만원(국비 11,200, 도비 1,440, 군비 3,360)

❍ 사업내용 : 어울림문화센터 조성(2,268㎡/3층) 및 청소년 문화의 집 조성

배후마을 공동이용시설, 원지 어울림마당, 보행 및 교통환경 개선

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12월

□ 추진사항

❍ 기본계획 수립 착수                          : 2020.  5월

❍ 기본계획 수립 완료                          : 2022.  2월

❍ 시행계획 수립 착수                          : 2022.  7월

□ 문제점 및 대책

❍ 정상추진 중

□ 향후 추진계획

❍ 시행계획 수립 완료                          : 2023.  9월

❍ 공사 착수                                   : 2023. 11월

❍ 공사 완료                                   : 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(농촌개발담당)
추진진도(%)	10%

16

농촌공간(모례지역 돈사철거) 정비사업

○ 악취문제로 민원이 지속적으로 제기되고 있는 지구의 유해시설을

정비하고 공간을 활용함으로써 정주여건을 개선하고 지역발전을 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신등면 모례리 95번지 일원

❍ 총 소요예산 : 금25,000백만원(국비 12,500, 도비 3,750, 군비 8,750)

❍ 사업내용 : 돈사 및 축사철거 4개소(용호농장, 삼현목장, 철원농장, 광남농장)

귀농·귀촌 임대주택 등 주거단지 조성 및 경관인프라 조성

❍ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2026. 12월

□ 추진사항

❍ 공모사업 선정                               : 2022.  6월

❍ 주민위원회 구성 및 한국농어촌공사 협약 체결 : 2022. 10월

❍ 기본계획 수립 착수 및 보상협의 추진         : 2023.  1월

□ 문제점 및 대책

❍ 년차별 예산 확보로 인해 일괄보상이 어려워 2023년도 2개소(용호농장,

삼현목장), 2024년도에 2개소(철원농장, 광남농장) 보상 집행 계획임

□ 향후 추진계획

❍ 기본계획 수립 완료                        : 2023.  9월

❍ 시행계획 수립                             : 2023. 11. ~ 2024. 12월

❍ 공사 착수                                 : 2025.  3월

❍ 공사 완료                                 : 2026. 12월

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(농촌개발담당)
추진진도(%)	10%

17

어린이 놀이마당 조성

○ 소재지 내 다목적 휴게 및 여가 공간을 마련하고 어린이 놀이마당을

조성함으로써 주민 편의를 증진하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 일원

❍ 총 소요예산 : 금400백만원(국비 280, 도비 36, 군비 84)

❍ 사업내용 : 부지조성 및 주차공간 정비, 휴게시설물 및 조경 식재

어린이 놀이마당 조성

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12월

□ 추진사항

❍ 기본계획 수립 착수                          : 2022.  7월

❍ 의견수렴을 위한 주민토론회 개최             : 2022.  9월

□ 문제점 및 대책

❍ 시천면 농촌중심지활성화사업 내 포함된 사업으로 기본계획 및 시행계획 수립 등 절차이행에 따른 시일이 소요됨에 따라 사업착수 지연

□ 향후 추진계획

❍ 기본계획 수립 완료                        : 2023.  8월

❍ 시행계획 수립                             : 2023. 10. ~ 2024. 10월

❍ 공사 착수                                 : 2025.  1월

❍ 공사 완료                                 : 2025. 12월

구 분	공약사업
담당부서	한방항노화과 (한방진흥담당, 약초경영담당)
추진진도(%)	45%

18

산청형 한방약초 생산기반 및 유통시스템 개선

○ 약초재배 농가의 생산비 절감 지원으로 안정적 생산기반 조성

○ 다양한 약초 판로확보를 통한 농가소득 증대 및 약초산업 활성화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금1,335백만원

❍ 사업내용

- 전략약초 및 한방약초안정생산지원

- 백도라지 지역특화작목단지 육성

- 경남생약조합과 농가 간 계약재배 추진

- 약초 수매 도입

- 약초생산 수매보조금 지원

- 약초재배 전문기술교육 확대 추진

□ 추진사항

❍ 전략약초 및 한방약초안정생산지원사업 - 31농가, 16종, 11.2ha - 36농가, 19종, 13.5ha	: 2022. 1. ~ 12월 : 2023. 1. ~ 9월
❍ 백도라지 분양 및 현장점검 - 1차 년도/8농가, 1.6ha, 25만주 식재) - 2차 년도/6농가, 1.5ha, 25만주 식재)	: 2022. 4. ~ 10월 : 2023. 4. ~ 6월
❍ 약초재배 전문기술교육 추진 및 수료(교육생 36명 수료)	: 2022. 7. ~ 8월
❍ 경남생약농업협동조합 계약재배(11농가, 12개품목, 8ha)	: 2022. 8. ~ 12월
❍ 경남생약농업협동조합 수매(11농가, 4.6ton, 27,017천원)	: 2022. 9. ~ 12월
❍ 약초생산 수매보조금 지원 - 13농가, 48ton, 23,423천원 - 20농가, 10.9ha 추진중	: 2022. 12월 : 2023. 7월

□ 문제점 및 대책

❍ 단순변심, 종자ㆍ종근 미확보, 식재적기 미식재 등의 사유로 사업 포기자 다수 발생

→ 당해 연도 사업 포기자 추후 사업대상자 선정 시 페널티 적용

❍ 약용작물의 소비위축, 판로미확보로 인한 약초재배 농가 및 면적 지속적 감소

→ 지역 특성에 맞는 약초 육성, 가공상품 개발 지원, 계약 재배 및          유통망 확보로 약초산업 경쟁력 강화

□ 향후 추진계획

❍ 2023년 약초 수매 연중 실시                    : 2023. 1. ~ 12월

❍ 2023년 약초생산 수매보조금 지원               : 2023. 7. ~ 12월

❍ 2023년 백도라지 지역특화작목육성 현장점검     : 2023. 10. ~ 11월

❍ 2023년 약초재배 현장점검 및 관리지도          : 2023. 10. ~ 12월

❍ 2023년 약초재배 전문기술교육 추진             : 2023. 11. ~ 12월

구 분	공약사업
담당부서	한방항노화과 (관리운영담당, 시설사업담당)
추진진도(%)	50%

19

동의보감촌 지속가능한 운영체계 구축

○ 동의보감촌 내 시설개선, 체험 콘텐츠 확충, 입장료 징수방안 마련을 통한 지속 가능하고 효율적인 관광지 운영체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 동의보감촌 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

❍ 총 소요예산 : 금12,791백만원(국비 1,125, 도비 897, 군비 10,769)

❍ 사업내용

- (시설개선) 엑스포 주제관 및 야외전시시설 리뉴얼, 특리지구 관광체험시설 부지조성 등

- (체험 콘텐츠) 스마트 공립박물관 구축, 체험 프로그램 보완·확충

- (관리운영) 입장료 징수방안 마련 및 시행

□ 추진사항

❍ (시설개선) 특리지구 관광체험시설 부지조성 착공	: 2021. 10월
❍ (시설개선) 엑스포주제관, 야외전시시설 리뉴얼 사업 등 착공	: 2023. 1월
❍ (체험 콘텐츠) 스마트 공립박물관 구축사업 사업 착공	: 2023. 1월
❍ (체험 콘텐츠) 스마트 공립박물관 구축사업 준공	: 2023. 7월
❍ (관리운영) 입장료 징수방안 수립을 위한 방문객 설문조사 실시	: 2023. 8월
❍ (시설개선) 엑스포주제관, 야외전시시설 리뉴얼 사업 등 준공	: 2023. 8월
❍ (시설개선) 관광체험시설 부지조성 후 엑스포 임시주차장 활용	: 2023. 8월

□ 문제점 및 대책

❍ 동의보감촌 입장료 징수 시 입주자와 협의 난항 예상

- 명품관광지 조성을 위한 합리적인 징수 방안 모색

□ 향후 추진계획

❍ (입장료 유료화) 동의보감촌 입장료 유료화 용역 24년 예산 반영	: 2023. 9월

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(문화예술담당)
추진진도(%)	15%

20

산청군 행복문화센터 건립

○ 문화예술활동 기반시설의 부족 해결을 위한 중소규모 공연장, 전시장,

교육장 등의 건립으로 문화예술 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 지리 327-4번지 일원

❍ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2024. 12월

❍ 총 소요예산 : 금6,000백만원(도비 3,000, 군비 3,000)

※ 제3단계 지역균형발전개발사업 예산 신청(3,000)

❍ 사업내용 : 행복문화센터 건립(지상 3층, 건축연면적 1,188㎡)

층별	세부시설 설치계획	비고
지상 3층	공연장, 강의실 등(396㎡)
지상 2층	공연장, 공연 준비실, 무대장비 조작실 등(396㎡)
지상 1층	상설 전시실, 강의실 등(396㎡)

□ 추진사항

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 승인                 : 2022. 10. ~ 12월

❍ 지방재정 투자심사 심의                         : 2023.  2월

❍ 건축 기획용역 실시                             : 2023.  3월

❍ 제3단계 지역균형발전개발사업 예산 신청(30억)    : 2023.  5월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 실시        : 2023.  7월

❍ 공공용 건물 설계공모 및 실시설계 용역 시행     : 2023. 10월

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과 문화예술담당
추진진도(%)	30%

21

한국선비문화연구원 활성화 지원

○ 고품격 선비문화 체험연수를 통한 선비정신 확산으로 물질위주 사고에서 비롯되는 제반 문제를 완화함으로써 국민행복과 화합, 국가 사회 발전에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 남명로240번길 33, 한국선비문화연구원

❍ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12월

❍ 총 소요예산 : 금6,000백만원(국비 3,500, 도비 1,250, 군비 1,250)

- 2023년 사업비 1,200백만원 (국비 700, 도비 250, 군비 250)

❍ 사 업 량 : 남명 선비문화 체험연수 활성화 사업 지원

❍ 사업내용

- 한국선비문화 체험연수(국·도비) 및 찾아가는 선비문화교실 운영
- 청렴리더십 아카데미 운영, 온라인 프로그램 강좌 운영

- 시설물 유지보수(군비)

- 연수 수료 후 설문조사 내용 반영을 통한 개선방안 마련

□ 추진사항

❍ 2020년 선비문화 체험연수 115회  7,522명         : 2020. 1. ~ 12월

❍ 2021년 선비문화 체험연수 131회  8,709명         : 2021. 1. ~ 12월

❍ 2022년 선비문화 체험연수 181회  11,584명        : 2022. 1. ~ 12월

❍ 2023년 선비문화 체험연수  98회  8,126명         : 2023. 1. ~  8월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2023년 2차 보조금 교부                             : 2023.  9월

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	20%

22

공공체육시설 확충

○ 공공체육시설의 확충으로 주민들의 여가생활 개선 및 체력증진과 공공체육시설의 체계적 유지·관리로 이용주민의 안전사고 예방 및 만족도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원(산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 등)

❍ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 12월

❍ 총 소요예산 : 금8,280백만원(도비 2,160, 군비 6,120)

❍ 사 업 량 : 파크골프장조성 4개소, 생초면 전지훈련 지원센터 조성 1개소 등

❍ 사업내용

- 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 파크골프장 조성

□ 추진사항

❍ 산청군 공공파크골프장 조성(생초면 신연리)

- 실시설계용역 및 소규모환경영향평가 용역 시행        : 2022. 8월

❍ 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 생초 중·고교 활용방안 수립 용역 시행               : 2023. 5월

❍ 단성면 파크골프장 조성사업 준공                      : 2023. 5월

❍ 오부면 파크골프장 조성사업 준공                      : 2023. 6월

❍ 신등면 파크골프장 조성사업 시행                      : 2023. 6월

□ 문제점 및 대책

❍ 하천구역 하천기본계획 변경 등 행정절차 지연 및 유휴부지 부족으로 사업 추진 애로

⇒ 하천관리청과 유기적 협의로 행정절차 조기 이행 및 적정 대상지 사유지 매입

□ 향후 추진계획

❍ 산청군 공공파크골프장 조성(생초면 신연리)

- 하천점용허가 및 소규모환경영향평가 협의       : 2024. 6월

- 공사 착공 및 준공                             : 2024.  7. ~ 12월

❍ 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 생초중학교 매입                               : 2024.  3월

- 기본계획 및 실시설계용역                      : 2024. 10. ~ 12월

- 공사착공 및 준공                              : 2025.  3. ~ 12월

❍ 신등면 파크골프장 조성사업 준공                : 2023. 11월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	5%

23

대원사 계곡길 연장사업

○「남한 제일의 탁족처(濯足處)」라 불리는 지리산 대원사 계곡을 따라 조성된「대원사 계곡길」을 연장하여 지리산을 찾는 탐방객에게 수려한 자연경관과 볼거리를 제공하고 국내 최고의 생태체험 및 힐링 공간으로 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 유평리 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2025년

❍ 총 소요예산 : 금3,000백만원(균특 1,500, 도비 450, 군비 1,050)

❍ 사 업 량 : 생태탐방로 조성 L=1.5km

❍ 사업내용

연 도	사업비(백만원)	사업 추진 내용	비 고
2023	300	·대원사계곡길 연장사업 실시설계 및 관련기관 협의	진행중
2024	1,000	·대원사계곡길 연장사업 L=0.5km	예정
2025	1,700	·대원사계곡길 연장사업 L=1.0km	예정

□ 추진사항

❍ 관광자원개발사업(균특전환) 건의                      : 2022. 7월

❍ 관광자원개발사업(균특전환) 예산 확정(실시설계용역비)   : 2023. 1월

❍ 실시설계용역 및 탐방로 입지적정성평가 작성 용역 시행: 2023. 3월

□ 문제점 및 대책

❍ 문제점 : 해당지역이 국립공원구역으로 탐방노선에 대한 행정절차 선행 필요

☞ 대책 : 국립공원구역 탐방로 입지적정성평가 신청을 통한 노선협의

□ 향후 추진계획

❍ 지리산 국립공원 협의 및 탐방로 입지적정성평가 : 2023. 6. ~ 12월

❍ 공사 착공 및 준공                        : 2024. 1. ~ 2025. 11월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	5%

24

밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축

○ 지리산으로 가는 대표적 관문이며 가을철 단풍길로 유명한 밤머리재터널

개통으로 기존 도로와 유휴공간을 활용하여 생태문화체험공간 등 지리산

생태관광 거점 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 향양리 ~ 삼장면 홍계리 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금3,000백만원(국비 1,500, 도비 450, 군비 1,050)

❍ 사 업 량 : 밤머리재 명품로드 조성 L=10km

❍ 사업내용

연 도	사업비(백만원)	사업 추진 내용	비 고
2023	600	·지역개발구역지정 및 실시설계용역	진행중
2024	1,000	·단풍나무 보식, 전망대 및 포토존 설치	예정
2025	1,400	·웅석봉 등산로 입구정비, 생태공원 조성 등	예정

□ 추진사항

❍ 백두대간권 발전종합계획 핵심사업 선정               : 2021. 5월

❍ 백두대간 v-힐링 스타트업로드 조성사업 예산 신청     : 2022. 4월

❍ 백두대간 v-힐링 스타트업로드 조성사업 `23년 국비 확정(3억) : 2023. 1월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 실시설계                                : 2023. 10. ~ 2024.  10월

❍ 군립공원 조성계획변경 협의              : 2024. 7. ~ 12월

❍ 사업 착수 및 준공                       : 2025. 1. ~ 2026. 12월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	40%

25

중산관광지 활성화사업

○ 수려한 자연경관을 보유하고 있는 지리산국립공원의 관문역할을 수행해 온

중산관광지가 시설 노후화, 주변관광지개발, 트렌드변화 등으로 경쟁력

상실과 관광객 감소로 활성화 방안이 필요

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 중산리 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

❍ 총 소요예산 : 금4,600백만원(균특 2,300, 도비 690, 군비 1,610)

❍ 사 업 량 : 중산관광지 활성화 A=292,515㎡

❍ 사업내용

연 도	사업비(백만원)	사업 추진 내용	비 고
2020	800	·실시설계 및 인허가	완료
2021	800	·생태탐방로 조성 L=1.29㎞	완료
2022	1,000	·물소리 빛광장 조성 A=2800㎡	완료
2023	2,000	·산악체험시설 및 경관조명 설치 등	진행중
2024		·하늘정원, 키즈파크, 입구게이트	진행중

□ 추진사항

❍ 지리산 두류생태탐방로 조성사업 실시설계용역 시행    : 2020. 1월

❍ 중산관광지 지정(변경) 및 조성계획(변경) 수립         : 2020. 2월

❍ 지리산 두류생태탐방로 조성사업 준공                 : 2021. 8월

❍ 중산관광지 물소리 빛광장 조성공사 준공              : 2022. 6월

❍ 중산관광지 공원 및 숲체험시설 실시설계 시행         : 2023. 3월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 중산관광지 공원 및 숲체험시설 실시설계 완료         : 2023. 10월

❍ 중산관광지 공원 및 숲체험시설 공사 착공 및 준공 : 2023. 11. ~ 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	10%

26

황매산 관광객 편의안전시설 조성사업

○ 사계절 수려한 자연경관을 가진 황매산의 기존 이용 시설을 원활하게

탐방할 수 있는 인프라를 구축하고 황매산의 특색있는 관광시설 확충

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면 법평리 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

❍ 총 소요예산 : 금3,190백만원(국비)

❍ 사 업 량 : 보도육교 설치 L=161m, B=3m, 보도육교 연결 전망대 2개소 설치, 연결데크로드 설치 L=175m, B=2m

❍ 사업내용

연 도	사업비(백만원)	사업 추진 내용	비 고
2021	474	·지역개발계획 변경	완료
2022		·실시설계용역	완료
2023	740	·전망대 설치 1개소, 보도육교 기초 설치	진행중
2024	1,976	·보도육교, 전망대 1개소, 연결데크로드 설치	예정

□ 추진사항

❍ 지역개발계획 변경 수요 조사서 제출              : 2021.  5월

❍ 지역개발계획 변경 관련 현장확인(국토부,경남도 등)  : 2021.  9월

❍ 관계기관 협의 및 관련법 검토 등                : 2021. 10. ~ 12월

❍ 지역개발계획 변경 승인                         : 2021. 12월

❍ 실시설계 및 인허가 협의                        : 2022. 10. ~ 12월

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 착공           : 2022. 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 준공           : 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광마케팅담당)
추진진도(%)	10%

27

남사예담촌 홍보지원 및 관광 활성화

○ 우리군 중심 관광지인 남사예담촌과 그 외 관광지를 통합적으로 홍보함으로써

남사예담촌뿐만 아니라 우리군 전반적인 관광사업 활성화 제고

○ 남사예담촌만의 특색있는 콘텐츠 기획∙개발로 남사예담촌 관광사업 활성화 모색

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 남사예담촌

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금9,150백만원(국비 4,700, 군비 4,450)

❍ 사업내용

- 다양한 홍보매체를 통한 관광 산청 집중 홍보

- 신규 관광 콘텐츠 개발 및 상품화 확대, 관광 인프라 추가 조성

□ 추진사항

❍ 홍보지원

- 옥외매체 홍보(지하철, 터미널, 옥외LED 등) : 매년
- 단체 관광객 유치 여행사 인센티브 지원 : 매년(예산 소진시 까지)

- 각종 박람회 참여 : 6회 참여

❍ 콘텐츠 개발 및 상품화

- 전통문화체험 관광프로그램 개발 및 상품화

▪ 프로그램 개발 및 홍보 : 2023. 1. ~ 5월

▪ 프로그램 운영 : 2023. 3. ~ 12월

- 야간관광 콘텐츠 개발 및 상품화

▪ 야간관광 특화도시 공모사업 설명회 참석 : 2023. 1. 12.

❍ 남사예담촌 인프라 구축사업

▪ 2023년 지역개발계획사업비 신청 및 확정 : 2022. 4. ~ 9월

▪ 공유재산 심의 및 관리계획 수립 : 2022. 10월

▪ 편입부지 보상협의 : 2023. 1. ~ 2023. 12월

▪ 실시설계용역 및 지역개발사업구역지정 신청 : 2023. 1. ~ 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 홍보지원

- 옥외매체 홍보(지하철, 터미널, 옥외LED 등) : 매년

- 단체 관광객 유치 여행사 인센티브 지원 : 매년(예산 소진시 까지)

- 각종 박람회 참여: 매년 연 3회 참여

- 드라마 및 온라인 마케팅을 통한 홍보 : 2023. 7. ~ 9월

❍ 콘텐츠 개발 및 상품화

- 전통문화체험 관광프로그램 개발 및 상품화

▪ 프로그램 운영 : 2023. 6. ~ 12월

- 야간관광 콘텐츠 개발 및 상품화

▪ 야간관광 특화도시 공모사업 신청 : 사업 공모 시 신청

❍ 남사예담촌 인프라 구축사업

▪ 남사예담촌 인프라 구축 사업 착공 및 준공 : 2023. 7. ~ 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광시설담당)
추진진도(%)	20%

28

생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성

○ 생초국제조각공원은 산청군을 대표하는 관광지로 많은 관광객이 방문하는 곳으로

꽃잔디 면적 확대 등을 통해 볼거리를 제공하고 주변상권 활성화 및

산청군 관광 이미지 제고에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 772번지 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

❍ 총 소요예산 : 금600백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 꽃잔디 확대 조성 6,000㎡(기존 조성면적 15,000㎡)

❍ 사업내용 : 꽃잔디 확대 조성대상지 잡목제거 및 정지작업

꽃잔디 추가 식재(480,000본)

□ 추진사항

❍ 꽃잔디 추가 보식 및 잡초제거                : 2022. 7. ~ 12월

❍ 문화재 시굴조사 완료                        : 2023. 6. ~  7월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 문화재 발굴조사 용역 시행                   : 2023. 7. ~  8월

❍ 부지조성 및 꽃잔디 식재(2,000㎡)             : 2023. 9. ~ 12월

❍ 꽃잔디 추가 식재(4,000㎡)                    : 2024. 1. ~ 12월

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(산림행정담당)
추진진도(%)	40%

29

군유림 밀원 식물단지 조성

○ 다양한 밀원수종 발굴을 통하여 지속적인 밀원수림단지를 확대 조성하고 양봉농가의 소득 창출에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 군유림

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12월

❍ 총 소요예산 : 금337.5백만원(국비 168.8, 도비 50, 군비 118.7)

❍ 사 업 량 : 총25ha(매년 5ha씩 조림)/현재까지 10ha조림

❍ 사업내용

- 양봉농가 숙원사업으로 조림사업 추진 시 군유림 밀원수림 조성

- 채밀기간 연장을 위하여 개화시기별 다양한 밀원수종 발굴 및 식재

- 밀원수 선정은 조림적지를 우선 고려하여 꿀 생산 능력이 높은 수종식재

- 조림지 사후관리 사업으로 밀원수 생육환경 개선하여 활착률 재고

□ 추진사항

❍ 2023년 대상지 확정 및 조림 예정지 정리 완료    : 2022. 12월

❍ 사업 대상지 정리                               : 2023. 1. ~ 2월

❍ 밀원수 식재(6ha) 및 사업 정리                   : 2023. 3. ~ 4월

❍ 조림지 사후 관리 추진 및 사업 정리             : 2023. 4. ~ 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 대부분 군유림의 고지대에 위치하고 있어 밀원수 조림의 활착 및 사후 관리(풀베기 등)에 따른 조림 성공률이 낮음

=> 입지적 여건에 맞는 밀원 조림 수종을 선택하고 자연환경(가뭄 등)에 따른 조림목 고사 지역에 대해 보식을 실시

=> 사후관리(풀베기 등) 시 조림목의 보호를 위하여 현장 관리 감독 철저

□ 향후 추진계획

❍ 2024년 대상지 확정 및 조림 예정지 정리 완료    : 2023. 12월

❍ 사업 대상지 정리                               : 2024. 1. ~ 2월

❍ 밀원수 식재(5ha) 및 사업 정리                   : 2024. 3. ~ 4월

❍ 조림지 사후 관리 추진 및 사업 정리             : 2024. 4월

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(산림보호담당)
추진진도(%)	30%

30

백두대간 생태축(밤머리재) 복원사업 복원사업

○ 민족의 영산 지리산과 웅석봉 군립공원을 연결하는 백두대간 생태축의    복원을 통해 생물 다양성 증진 및 민족의 정기성 회복에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 밤머리재 일원

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12월

❍ 총 소요예산 : 금5,810백만원(국비 4,067, 도비 523, 군비 1,220)

합 계	2022년	2023년	2024년	2025년
5,810,000천원	1,249,075천원	2,850,000천원	1,710,925천원

❍ 사 업 량 : 터널설치 1개소(B=14m, L=50m), 식생기반토 성토, 자생식물 식재 등

❍ 사업내용 : 지리산과 웅석봉 군립공원의 생태계 연계성 회복 및 산림복원을 위해 터널 설치 후 수목 식재 사업

□ 추진사항

❍ 시공단계의 건설사업관리계획 수립               : 2023. 3월

❍ 건설사업관리용역사업 도 회계과 심사            : 2023. 3월

❍ 시공업체 발주 및 계약체결                      : 2023. 4월

❍ 전신주 및 통신시설 이설 요청                   : 2023. 4월

❍ 공사 및 관급자재(레미콘,철근) 선급금 지급       : 2023. 5월

❍ 폐기물처리용역 및 기술지도 용역 계약           : 2023. 5월

❍ 시공 하도급 계약 검토 승인                     : 2023. 7월

❍ 건설사업관리용역 사업수행능력평가(PQ) 계획수립 : 2023. 8월

❍ 주민설명회(도로통제 등 안내/ 삼장면,시천면)      : 2023. 8월

□ 문제점 및 대책

❍ 공사기간 밤머리재 교통 통제로 인한 민원발생 우려

→ 밤머리재 터널 개통과 사업홍보 등으로 민원 불편 해소

□ 향후 추진계획

❍ 건설사업관리 용역(감리) 기술평가(PQ) 심의  : 2023. 10월

❍ 전면 도로통제 고시                        : 2023. 10월

- 전면 통제 기간: 2023. 10. 23. ~ 2024. 12. 31.

- 전면 통제기간은 향후 날씨 및 공사사정에 따라 변동 가능

❍ 전신주 및 통신시설 이설 공사              : 2023. 11월

❍ 건설사업관리 용역(감리) 계약 및 착수       : 2023. 11월

❍ 백두대간 생태축 복원사업(1차분) 정산       : 2023. 12월

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(산촌소득담당)
추진진도(%)	40%

31

산림신품종 재배단지 조성

○ 부가가치가 높은 산림신품종을 활용한 산림생명산업 기반을 조성하고 공공성 강한 사회적협동조합 구성으로 일자리 창출 및 주민 소득 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 길리 산98-1번지 일원

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 5.

❍ 총 소요예산 : 금2,500백만원(국비)

❍ 사 업 량 : 재배단지 5ha, 관리 및 작업시설 건축 400㎡ 외

❍ 사업내용

- 꾸지뽕 재배단지 조성(포지, 온실 등)

- 관리시설 1동, 작업시설 1동 등

□ 추진사항

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 용역                : 2022. 6월

❍ 사회적협동조합 설립준비위원회 개최              : 2022. 7. ~ 9월

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 중간용역 보고       : 2022. 9월

❍ 산청틔움사회적협동조합 창립                     : 2022. 10월

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 최종 보고           : 2022. 12월

❍ 산림신품종재배단지 공사 계약 및 시행            : 2023. 7월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 신품종재배단지 조성사업 입구 도로 확포장 공사 시행 : 2023. 9. ~ 10월

❍ 신품종재배단지 조성사업 착공 및 준공            : 2023. 10. ~ 2024. 5월

❍ 신품종재배단지 관리 및 운영                     : 2024. 5월

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(녹지조성담당)
추진진도(%)	40%

32

둔철 산림생태인프라 구축사업

○ 자연경관이 수려한 신안면 둔철 지역 내 산림생태인프라를 구축하여 산림관광명소 조성 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 안봉리 산19-8번지 일원

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12월

❍ 총 소요예산 : 금2,500백만원(전환 1,000, 도비 300, 군비 1,200)

❍ 사 업 량 : 자생식물원 1개소, 습지생태관찰소 1개소, 둔철정비대 정비, 그라스생태원 조성 1개소, 수국꽃길조성 1.7km 등

❍ 사업내용

- 생태관찰시설 : 자생식물원, 습지생태관찰소 조성 등

- 생태숲보완사업 : 둔철천문대 정비 및 확장, 그라스생태원 조성, 수목보식, 수국꽃길조성 등

□ 추진사항

❍ 사업대상지 현장조사 및 선정	: 2022. 1. ~ 6월

❍ 경상남도 산림휴양과 업무 협의	: 2022. 12월

❍ 수국꽃길 조성	: 2023.  4월

❍ 둔철생태숲 내 야생화 동산 조성       : 2023.  5월

□ 문제점 및 대책

❍ 지방전환 사업비로 전환사업 신청 시 반영 요청

□ 향후 추진계획

❍ 지방전환 사업비 확보 건의            : 2023. 10월

❍ 둔철 산림생태인프라 구축사업 시행	: 2024. 1. ~ 2026. 12월

구 분	공약사업
담당부서	주민복지과(복지기획담당)
추진진도(%)	100%

33

사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원

○ 사회복지현장 최일선에서 근무하는 사회복지시설 종사자의 처우개선

향상을 통하여 사회복지사 등의 지위 향상 및 사회복지 서비스의 질

향상에 기여

□ 사업개요

❍ 지원대상 : 사회복지시설에 종사하는 사회복지사 및 장기요양요원 등

❍ 지원조건 : 산청군 관내 주소를 두고, 월 20일 이상, 일 8시간 이상

근무하는 종사자

❍ 소요예산 : 금1,468백만원(군비)     ※ 2023년 256백만원

❍ 사업내용 : 처우개선비 인상 지원

- 지원인원 : 428명

- 인상지원 : (기존) 월 3만원 → (변경) 월 5만원(증 2만원)

□ 추진사항

❍ 2023년 본예산 편성 및 확보               : 2022. 12월

❍ 사업추진(처우개선비 인상 지원 시행)       : 2023.  1월(매월지급)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 처우개선비 인상 지원 사업 추진                : 2023.  1. ~ 12월

구 분	공약사업
담당부서	복지지원과(장애인복지담당)
추진진도(%)	5%

34

산청군 장애인회관 신축

○ 관내 산발적으로 분산되어 있는 장애인 복지시설 및 단체를 장애인회관 신축으로 통합 관리·운영하여 장애인복지 서비스 향상 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 산11-1 일원

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2024년

❍ 총 소요예산 : 금7,000백만원

(특별교부세 2,000, 특별조정교부금 1,500, 도비 1,200, 군비 2,300)

❍ 사 업 량 : 2층 규모, 연면적 1,865.91㎡

❍ 사업내용 : 건물 1동 신축

□ 추진사항

❍ 지방재정투자심의                               : 2020. 11. 10.

❍ 공유재산 관리계획 승인                         : 2020. 11. 16.

❍ 공공건축 사업계획 사전검토                     : 2020. 12 .23.

❍ 산청군 공공건축심의위원회 심의                 : 2021. 7. 2.

❍ 기본계획 및 실시설계 용역                      : 2022. 3. 21. ~ 12. 28.

❍ 공사착공                                       : 2023. 5. 1.

□ 문제점 및 대책

❍ 지반 안정성 문제 발생으로 지반 안정성 검토 용역 시행

❍ 추가 사업비 증가 및 공기 연장 예상

□ 향후 추진계획

❍ 공사 중단에 따른 사업기간 연장 및 추가 사업비 확보 방안 마련

구 분	공약사업
담당부서	복지지원과(여성가족담당)
추진진도(%)	30%

35

다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원 헤어컷지원(HY견고딕, 24)

○ 다문화가족 자녀에 대한 헤어컷 비용 지원으로 다문화가족의 양육 부담

경감 및 생활안전 및 지역사회 소속감 고취

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금210백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 320여명(만18세 이하 다문화가족 자녀)

❍ 사업내용 : 1인당 연 240천원(월20천원) 헤어컷 비용 지원

□ 추진사항

❍ 관내 다문화가족 실태 조사 및 다양성 욕구 파악  : 2022. 12월

❍ 세부 추진계획 수립                             : 2023.  3월

❍ 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청         : 2023.  5월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 다문화가족 자녀 헤어컷비 관련 조례 정비        : 2024.  3월

❍ 2024년 추경 예산 확보                          : 2024.  4월

❍ 바우처카드 업무 협약 체결                      : 2024.  6월

❍ 읍면 신청 접수 및 사업 시행                    : 2024.  7월

구 분	공약사업
담당부서	복지지원과(여성가족담당)
추진진도(%)	10%

36

성폭력 전문상담소 운영

○ 성폭력·가정폭력 피해 발생시 피해자에 대한 신속한 상담 및 치료 등

지원서비스 제공을 통한 적극 대처 및 보호 지원체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면(청소년 문화의 집 1층)

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금300백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 성폭력 상담소 설치 운영 1개소

❍ 사업내용 : 관내 성폭력 및 가정폭력 상담, 교육, 예방활동 등

□ 추진사항

❍ 경남 도내 성폭력 상담소 현황 파악

❍ 신안 청소년 문화의 집 내 성폭력 전문상담소 조성 설계 반영 및 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 세부 추진계획 수립                             : 2024.  7월

❍ 2025년 본 예산확보                             : 2024. 10월

❍ 상담소 위탁운영 공고 및 선정                   : 2025.  1월

❍ 성폭력 전문상담소 운영                         : 2025.  3월

구 분	공약사업
담당부서	복지지원과(노인복지담당)
추진진도(%)	70%

37

산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진

○ 일상생활 영위가 어려운 취약노인에게 적절한 돌봄서비스를 제공하여 안정적인 노후생활 보장, 신체적·정신적 건강 유지 및 노인 욕구에 맞는 서비스 제공으로 예방적 복지를 도모

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022.8. ~ 2026. 12월

❍ 총 소요예산 : 금22,589백만원(국비 10,681, 도비 2,320, 군비 9,588)

- 2023년 사업비 4,373백만원 (국비 2,141, 도비 403, 군비 1,830)

❍ 사업내용 : 맞춤형 돌봄서비스(말벗지원, 일상생활지원, 식사배달, 생활교육, 응급구조, 인공지능(ICT)연계 서비스 등)를 제공하여 노인의 기능·건강 유지 및 악화 예방

사업명	인원(명)	사업비(백만원)	사업내용	비고
소 계	3,934	4,373
노인맞춤돌봄	2,048	2,728	안전·안부지원, 생활교육, 일상생활지원, 민간후원연계 등
재가노인지원	400	1,117	말벗지원, 사회참여활동 등
식사배달지원	186	148	주 1회 밑반찬 배달	자체
무료빨래방	400	40	세탁물 방문, 수거, 빨래	자체
노노케어	20	63	노인이 취약 노인을 케어
응급안전알림	580	128	화재,가스,활동감지기로 응급구조
ICT연계 통합돌봄	300	149	AI로 말벗지원 및 IoT로 응급구조

□ 추진사항

❍ 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진계획 수립         : 2022.  7월

❍ 사업 내실화를 위한 무료빨래방 등 사업 장비 교체     : 2022. 12월

❍ 사업 운영사항 점검 및 평가                          : 2022. 12월

❍ 응급안전안심서비스 신규장비 120대 추가 설치         : 2023.  6월

❍ 홀로어르신 가구 일산화탄소 경보기 400대 설치        : 2023. 8월

❍ 응급안전안심서비스 신규장비 100대 추가 설치         : 2023. 8월

□ 향후 추진계획

❍ 응급안전안심서비스 신규장비 80대 추가 설치 예정     : 2023. 9월

❍ 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 대상자 발굴 및 확대 지원   : 수시

구 분	공약사업
담당부서	환경위생과(환경보전담당)
추진진도(%)	10%

38

민물고기 먹거리타운 명품화 지원사업

○ 생초 소재지에 민물고기 먹거리타운임을 알릴 수 있는 아치형 간판을 설치하여 탐방객들의 편의제공 및 음식문화를 개선함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 259-12번지 일원

❍ 사업기간 : 2023년

❍ 총 소요예산 : 금100백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 아치형 간판 설치

❍ 사업내용 : 생초시장 입구 민물고기 먹거리타운 아치형 간판 설치

□ 문제점 및 대책

❍ 안전총괄과 「생초지구 풍수해생활권 종합정비사업」실시로 인한 사업구간 중복으로 인해 해당 정비사업 추진상황에 맞춰 본 사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ 간판 위치 선정                                   : 2023.  9월

❍ 간판디자인 개발 및 선정                          : 2023. 10월

❍ 간판디자인 제작 및 설치                          : 2023. 12월

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(상수도담당)
추진진도(%)	60%

39

상수도 시설확충

○ 산청군내 지방상수도 미급수지역에 원수 부족 및 수질 불량 등의 문제로지방상수도 수혜지역을 확장하여 안정적이고 깨끗한 상수도 공급

○ 지방상수도 운영중이나 시설정비가 필요한 취⋅정수 시설을 확장 및 개선하여 맑은 물 공급에 능동적으로 대처하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12월(Ⅱ단계)

❍ 총 소요예산 : 금86,008백만원(국비 39,428, 도비 30,355, 군비 16,225)

- 단성급수구역 : 19,360백만원

- 시천급수구역 : 10,000백만원

- 삼장지구 인입공사(2공구) : 10,900백만원

- 단성급수구역 비상공급망 구축사업 : 11,348백만원

- 산청·생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 : 24,400백만원

※ 산청급수구역(오부·금서지구) 준공완료(10,000백만원)

❍ 사업내용

- 정수장증설(시천, 산청・생초), 배수지 설치(삼장), 관로매설 L=120km,        가압장 및 감압변 설치 등

□ 추진사항

❍ 삼장2지구(3차분)  공사 착공                       : 2022.  7월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 공사 착공       : 2022.  7월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 설계용역 착공      : 2022. 11월

❍ 단성정수장증설(5,700톤) 준공                      : 2022. 12월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 공사 착공       : 2023.  6월

❍ 단성정수장증설(단성·신안지구) 공사 착공          : 2023.  6월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 준공            : 2023.  8월

□ 문제점 및 대책

❍ 단성급수구역 비상공급망 구축사업(신등·신안지구)시 송수관로 추가 매설 사업 병행시공이 필요함

⇒ 국․도비 추가 확보

□ 향후 추진계획

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 착공                 : 2023. 10월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 설계 용역 준공     : 2023. 11월

❍ 삼장2지구(3차분) 준공                             : 2023. 12월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 준공            : 2024.  6월
❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 착공	: 2024.  6월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 준공                 : 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(하수도담당)
추진진도(%)	60%

40

공공하수도 수혜지역 확장

○ 공공수역으로 무분별하게 배출되는 생활오수로 인해 하천오염이 심각한      실정이며 남강댐 상류부로서 하천의 주요 오염원인 생활오수를 사전에      차단하여 공공수역의 수질개선에 기여하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면 상법리, 단성면 방목리, 시천면 사리, 생초면 노은리 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금38,475백만원(국비 26,960, 도비 2,894, 군비 2,918, 기금 5,703)

❍ 사 업 량 : 하수관로 L=24.2km, 배수설비 608가구

하수처리장 증설(신안단성 1,200톤/일, 시천 250톤/일)

❍ 사업내용 : 하수처리시설 신·증설 및 하수관로 매설, 배수설비 등

□ 추진사항

❍ 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업 착수          : 2023.  3월

❍ 상법지구 공공하수도 정비사업(4차분) 착수          : 2023.  6월

❍ 시천 공공하수처리시설 증설사업 착수              : 2023.  6월

❍ 석대지구 공공하수도 설치인가 및 재원 협의        : 2023.  8월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 상법지구 공공하수도 정비사업 완료                : 2023. 10월

❍ 석대지구 공공하수관로 설치사업 착수              : 2023. 11월

❍ 시천지구 농어촌마을하수도 증설사업 완료          : 2024. 12월

❍ 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업 완료          : 2025. 12월

❍ 석대지구 농어촌마을하수도 증설사업 완료          : 2026.  6월

구 분	공약사업
담당부서	보건정책과(보건행정담당)
추진진도(%)	100%

41

내과 전문의 채용 추진

○ 의료취약지역의 공공보건의료서비스 개선 및 진료 분야 운영 활성화를

통한 지역사회에 양질의 보건의료서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 중앙로 97, 산청군보건의료원 내

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금1,500백만원(군비)

❍ 사업내용 : 내과전문의 채용

□ 추진사항

❍ 산청군 지역보건의료사업 업무대행에 관한 조례 제정 : 2022. 10월

❍ 업무대행의사(내과 전문의) 채용 공고 실시 : 2022. 11. ~ 2023. 4월

❍ 업무대행의사(내과 전문의) 채용 및 업무대행 계약 체결 : 2023. 5월

❍ 산청군보건의원 내과 진료 개시           : 2023. 6. 12.

□ 업무대행의사(내과 전문의) 프로필

❍ 성    명 : 유 재 등

❍ 주    소 : 서울 송파구

❍ 학    력 : 건국대학교 의과대학 졸업

❍ 주요경력

- 건국대학교병원 내과 과장 : 1998 ~ 2002년

- 청주시 유내과의원 원장   : 2012 ~ 2023. 6월

구 분	공약사업
담당부서	건강관리과(감염병관리담당)
추진진도(%)	60%

42

감염병 선제적 방역 시스템 확충

○ 감염병 선제적 방역시스템 구축으로 감염병 환자 발생 시 신속한 보고와

조치가 이루어져 상황 종료까지 감염병 예방 및 지역사회 전파 차단에 만전을

기하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금4,436백만원

❍ 사업내용

- 코로나19 선별진료소 상시 운영 및 비상방역체계 강화

- 감염병 감시 및 조기발견 체계 강화를 위한 핫라인 구축

- 감염병 재유행 대비 감염병 감시체계 강화

□ 추진사항

❍ 코로나19 선별진료소 운영(연중) 103,023건              : 2022. 6월 ~

❍ 감염취약시설 선제검사(주2회→주1회→권고) 23개소 22,169명   : 2022. 6월 ~

❍ 감염취약시설 감염병 발생 대응체계 구축 및 지속 관리 : 연중

❍ 주요 법정감염병 연중 감시체계 운영(1~4급)            : 연중

❍ 하절기 방역 비상근무 및 취약지역 친환경 방역소독    : 연중

❍ 해충기피제 보관함 설치 55대(2023 태양광 보관함 신설 6대) : 연중

❍ 해충 포충기 설치 188대(2023년 신설 10대)               : 연중

□ 문제점 및 대책

❍ 주기적 감염병 재유행 대비 기 확충된 인력 유지 및 지속적 지역사회 감염병 예방 및 관리 필요

□ 향후 추진계획

❍ 코로나19 비상방역체계 유지 및 비상방역대책반 운영  : 코로나19 위기단계 종료 시 까지

❍ 감염취약시설 감염병 발생 대응체계 구축 및 관리 : 연중

❍ 주요 법정감염병 연중 감시체계 운영(1~4급) : 연중

❍ 감염병 대응 교육 및 지역주민 대상 감염병 예방·홍보 : 연중

구 분	공약사업
담당부서	건강관리과(건강지원담당)
추진진도(%)	90%

43

노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 사업

○ 산청군 자체 예산으로 만성 퇴행성관절염으로 고통받는 어르신께 인공관절      수술기회 제공 및 의료비 지원으로 건강하고 활기찬 노후 생활 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12월

❍ 총 소요예산 : 27.5백만원(군비)

※ 2023년 사업비 20백만원(2차추경 포함)이며, 추후 군민 수요 반영 예산 조정

❍ 사업내용

- 산청군에 주소를 둔 만 60세 이상 군민 중 의료급여 수급권자 또는 기준중위소득          100분의 100이하인 신청자의 수술비 중 본인부담금 지원

- 한쪽 무릎 기준 100만원 한도, 양쪽 무릎 기준 200만원 한도로 수술비 등 지원

□ 추진사항

❍ 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 확대 추진 계획 수립  : 2022.  7월

❍ 2022년 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 실시          : 2022. 10. ~ 12월

❍ 산청군 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원에 관한 조례 제정  : 2022. 12월

❍ 2023년 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 계획 수립      : 2023.  1월

❍ 2023년 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 실시           : 2023.  2월

□ 문제점 및 대책

❍ 인공관절 수술 후에는 지원이 되지 않으므로 읍·면 이장회의 등을 통하여 반드시 수술 전에 신청하도록 주민 홍보

□ 향후 추진계획

❍ 읍․면 이장회의, 현수막 게시 등으로 사업 홍보

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(농업정책담당)
추진진도(%)	50%

44

농업보조금 확대 지급

○ 농업인 대상 보조사업 획대 시행으로 농산물의 안정적인 생산기반 마련

○ 신규 고소득 작목 개발 및 시설개선으로 고품질 농특산물 생산을 통한 시장 경쟁력 강화 및 농가소득 증대

○ 축산농가 가축분뇨의 자원화로 환경보전 및 악취로 인한 민원발생 방지

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

구분	총액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계	47,979	6,619	8,920	9,830	10,980	11,630
국비	991	74	154	231	231	301
도비	2,637	414	535	552	560	576
군비	42,081	5,901	7,601	8,267	9,174	9,463
기타	2,270	230	630	780	1,015	1,290

❍ 총 소요예산 : 금47,979백만원

❍ 사업내용 : 연간 6,619백만원 지원되는 농업소득증대사업 외 9개 사업 등 각종 보조금을 11,630백만원으로 확대 지원

□ 추진사항

❍ 사업계획 수립 및 사업대상자 선정              : 매년 1 ~ 2월

❍ 농업인 건의사항 농정반영을 위한 간담회 개최   : 2023. 3 ~ 5월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 사업 추진(가능한 상반기 완료)                    : 매년 3 ~ 11월

❍ 각종 보조사업 예산 편성 및 확보                : 매년 10월

❍ 사업비 정산                                   : 매년 12월

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(전원농촌담당)
추진진도(%)	20%

45

청년 농업인, 귀농·귀촌 지원사업 확대

○ 젊고 유능한 인재의 농업 분야 진출을 촉진하는 선순환 체계 구축, 농가 경영주의 고령화 추세 완화 등 농업 인력구조 개선과, 도시민의 귀농귀촌 희망자의 안정적인 농촌정착 및 지역 활력 회복을 위한 지원 사업 확대 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 전 지역

❍ 총 소요예산 : 금1,375백만원(군비)

❍ 사업내용 : 귀농인 이사비 지원, 신규농업인 영농정착 지원, 귀농귀촌 주택수리비 지원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

□ 추진사항

❍ 귀농귀촌 개인별 전문 상담을 통한 인구유입 추진

- 2023년 상담실적(6. 15.기준) : 295건

❍ 도시민 유치 귀농귀촌 박람회 참석 : 4회

❍ 귀농인의 집 운영지원 : 8개소(1개소 선정 후 리모델링 중)

❍ 2023년 귀농귀촌 유치지원사업 공모 선정으로 사업비 확보 : 221백만원

❍ 2023년 귀농인 이사비 지원 6건, 신규농업인 영농정착 지원 13건, 귀농귀촌 주택수리비 지원 10건

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 귀농귀촌 상담사 채용을 통한 지속적인 상담서비스 제공

❍ 도시민 유치 귀농귀촌 박람회 및 지역축제 참가 : 6회(박람회 4회, 축제 2회)

❍ 마을단위 찾아가는 융화교육 실시 : 10회

❍ 귀농귀촌 멘토링 지원 : 20회

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(농업정책담당)
추진진도(%)	100%

46

농촌인력중개센터 운영

○ 농업 분야 특화된 인력수급 지원체계 구축을 통해 농촌인구 감소, 고령화 및

계절성에 따른 농촌 일손 부족 문제 완화 및 해소에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : NH농협은행 산청군지부

❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2026. 12월

❍ 총 소요예산 : 금507.5백만원

- 2023년 사업비 금117.5백만원(국비 35, 도비 15.75, 군비 66.75)

❍ 사 업 량 : 영농작업반 11개반 200여명 구성

❍ 사업내용 : 농촌지역 일손부족현상 완화를 위해 농촌인력중개센터를 설치하여 전담

인력 배치, 구인구직 수요조사 인력풀 내에서 근로인력을 중개하는 사업

□ 추진사항

❍ 남해군, 창녕군 인력중개센터 운영사례 조사          : 2022. 9월

❍ 농협중앙회 산청군지부 인력중개센터 운영 확정       : 2022. 10월

❍ 2023년 농촌인력중개센터 선정                       : 2023. 1월

❍ 농협중앙회 산청군지부 인력중개센터 인력 채용 및 개소 : 2023. 3월

❍ 상반기 농촌인력중개 606농가 2,811명 (중개률 100%)

□ 문제점 및 대책

❍ 관내 인력부족으로 인근 지자체 도시 인력 유입을 위한 유인책 마련

❍ 적극적인 홍보와 연중 일감 확보를 통한 영농작업반 구성

❍ 농협중앙회의 적극적인 지원을 통한 예산 추가 확보

□ 향후 추진계획

❍ 인력모집 및 홍보(전단지 현수막, 지역내 구직단체 협약 등) : 연중

❍ 농촌인력중개센터의 안정적 정착과 활성화 도모

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(친환경농업담당)
추진진도(%)	70%

47

친환경농업 인프라 확충 및 지원

○ 사람과 자연이 공존하는 친환경농업 인프라 확충으로 안전한 먹거리      생산지원 및 농가소득 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금3,587백만원(군비)

❍ 사업내용 : 친환경인증수수료 지원사업, 친환경인증농가 장려금 지급,

친환경인증농가 유박지원사업

□ 추진사항

❍ 2023년 친환경인증수수료 지원사업 : 590농가, 160백만원

❍ 2023년 친환경인증농가 장려금 지원사업 : 770ha, 271백만원

❍ 2023년 친환경인증농가 유박지원사업 : 590농가, 274백만원

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 지속가능한 친환경농업 육성사업 추진 : 2023 ~ 2026년

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(친환경농업담당)
추진진도(%)	60%

48

직불금 확대

○ 쌀 공급에 대한 탄력적 대응을 위해 타작물 재배 직불금 지원으로 쌀값

안정 및 농가소득 안정화를 통한 모두가 행복한 산청구현

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 총 소요예산 : 금3,140백만원(국비 400, 도비 50, 군비 2,690)

❍ 사업내용 : 논 타작물재배 농지 3,000천원/ha 직불금 지급

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

□ 추진사항

❍ 2022년 논타작물 재배 지원사업 보조금 교부   : 2022. 12월

❍ 2023년 전략작물직불제 지원사업 신청 및 접수 : 2023. 2. ~ 5월

❍ 2023년 논타작물 재배 지원사업 신청 및 접수  : 2023. 2. ~ 6월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 논타작물 읍면 이행점검                      : 2023. 7. ~ 9월

❍ 전략작물직불제 농관원 이행점검              : 2023. 8. ~ 10월

❍ 직불금 지급                                 : 2023. 12월

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(축산내수면담당)
추진진도(%)	70%

49

흑돼지 명품화 사업 지속 확대

○ 모돈 갱신 등 개량 지원을 통한 생산성 제고로 흑돼지 기반 확대 및 특색있는 미래 축산 소득원으로 흑돼지 브랜드 활성화로 농가소득 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 오부면, 생초면, 신등면, 금서면

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금1,704백만원(도비 94 군비 758 자부담 852)

❍ 사업내용 : 흑돼지 농가 육성사업(모돈 및 웅돈), 냉방기 구입, 폐사축처리기 지원

□ 추진사항

❍ 2023년 흑돼지농가 육성지원사업 : 모돈교체 30두, 18백만원

❍ 2023년 폐사축처리기 지원 : 1대, 30백만원

□ 문제점 및 대책

❍ 흑돼지 노령돈·저능력돈으로 인한 생산성 저하

❍ 흑돼지 농가 육성사업(모돈교체, 웅돈구입, 우수정액구입 등)지원으로 능력개량 향상(출하두수 증가 및 사육시간 단축)

□ 향후 추진계획

❍ 흑돼지 농가 육성을 위한 사업 추진        : 2023 ~ 2026년

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(축산내수면담당)
추진진도(%)	80%

50

유기축산 한우단지 확대

○ 산청친환경농업과 축산업이 연계한 자연순환농업의 실현 및 유기한우 관련 산업육성으로 유기농한우의 보전 및 지원확대를 통한 축산농가 소득 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면, 오부면 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금3,819백만원(군비 3,539, 자부담 280)

❍ 사업내용 : 유기축산조사료생산지원, 유기농한우 유기사료 차액보전,

유기한우포장재 지원사업

□ 추진사항

❍ 2022년 유기농한우 유기사료 차액보전 : 250두, 195백만원

❍ TMR사료 구입비 지원 : 5,000톤, 200백만원

❍ 유기한우 포장재 지원 : 500,000매, 50백만원

❍ 유기축산용 조사료 생산 지원 : 200톤, 20백만원

❍ TMR사료 구입 예산 추가 확보 : 165,000천원(70원/kg 지원)

❍ 2023년 유기한우 포장재 지원 : 30백만원

❍ 2023년 TMR사료 구입비 지원 : 42백만원(1,058ton)

□ 문제점 및 대책

❍ 일반 한우 가격 상승으로 유기한우와 가격차이가 크지 않아 유기농 한우 입식농가 감소

❍ 유기한우와 일반한우의 가격차이에 대한 보전 방안 강구

□ 향후 추진계획

❍ 유기한우 사육농가 및 사육두수 확대를 위한 사업 추진  : 2023 ~ 2026년

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(축산내수면담당)
추진진도(%)	30%

51

흑돼지 축제 개최

○ 흑돼지 축제 개최로 산청흑돼지의 부가가치를 높이고 농가소득 창출

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청한방약초축제행사장 내

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금200백만원(군비)

❍ 사업내용 : 산청흑돼지 시식회, 산청흑돼지 요리경연대회, 산청흑돼지 홍보 캠페인 등

□ 추진사항

❍ 타 시군 축제 행사 견학 : 2022. 10월

□ 문제점 및 대책

❍ 산청흑돼지만으로 축제를 개최하기엔 농가수 및 사육규모 등 자원부족

❍ 산청흑돼지 가공·체험등을 통해 부가가치를 높이고 농가소득 및 사육기반 여건조성으로 축제기반 마련

□ 향후 추진계획

❍ 산청흑돼지 우수성 홍보 및 소비촉진행사 추진  : 2023 ~ 2026년

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(가축방역담당)
추진진도(%)	5%

52

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

○ 가축분뇨 공동자원화시설 이전 신축으로 가축분뇨 자원화 및 안정적

처리를 통한 축산농가의 소득증대 및 주거환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금25,200백만원(국비 12,600, 도비 2,520, 군비 2,520, 융자 7,560)

❍ 사 업 량 : 축분퇴비유통센터 신축 1개소

❍ 사업내용 : 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화) 시설 이전

□ 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의 : 2022. 10.

❍ 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의   : 2023. 2. 15.

❍ 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의          : 2023. 4. 4.

❍ 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협)    : 2023. 4. 12.

- 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여

공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함

❍ 사업대상지 물색                                    : 2023. 4월 ~

□ 문제점 및 대책

❍ 사업부지 선정 및 주민동의 절차 이행 애로

- 후보 지역 등에 숙원사업 지원 등으로 지역민 동의 추진

□ 향후 추진계획

❍ 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행             : 2024. 2월

❍ 사업신청                                        : 2024. 3월

❍ 사업시행 및 완료                                : 2025 ~ 2026년

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(미래농업담당)
추진진도(%)	30%

53

기후변화에 대비한 전략 재배작물 육성

○ 기후변화에 대비하여 우리 지역에 적합한 재배작물을 도입 육성함으로써  신규 농업인이 안정적으로 농촌에 정착할 수 있도록 유도

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 총 소요예산 : 금3,600백만원(군비 1,800, 자부담 1,800)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12월(4년간)

❍ 사 업 량 : 신품종 및 아열대 원예작물 시설재배단지 3ha 조성

❍ 사업내용 : 신품종 및 아열대 원예작물 시설 지원(애플망고, 만감류, 샤인머스겟, 블루베리 등)

□ 추진사항

❍ 사업대상자 신청 접수                      : 2022. 12. ~ 2023. 1월

❍ 대상자 선정 및 사업추진                   : 2023.  3. ~ 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 시설 과수에 대한 농업인 전문지식 부족과 재배 중 다양한 문제 발생

❍ 전문지도사의 역량향상을 통한 사후 농업인 컨설팅 실시

□ 향후 추진계획

❍ 농업기술센터 내 아열대작물 실증시험 기반 조성   : 2023. 9. ~ 11월

❍ 시설 과수 농업인 현장 컨설팅 실시               : 2023.  9월 ~

❍ 사업완료 및 평가회                              : 2023. 12월

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(과수특작담당)
추진진도(%)	25%

54

고품질 산청사과 명품화 지원

○ 이상기상 대응 고품질 명품사과생산으로 산청사과산업 경쟁력강화

○ 품종 다양화와 중 ․ 소과생산을 통한 소비 다변화 대응 및 소득증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 사과재배단체 및 농가

❍ 총 소요예산 : 금2,200백만원(군비 1,100, 자부담 1,100)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12월(4년간)

❍ 사업내용

- 과원안정생산 기반시설, 방조망 시설, 관수 및 냉해예방시설

- 국내육성품종갱신, 고속방제기, 선별기, 친환경농자재 지원 등

□ 추진사항

❍ 사업완료 7개소, 품목교육 4개 작목반 각 2회 실시 : 2023. 1. ~ 6월

- 고소작업차, 고속분무기, 품종갱신 등 사업 추진

□ 문제점 및 대책

❍ 보조사업에 대한 철저한 교육과 수시점검으로 조속한 사업 마무리

□ 향후 추진계획

❍ 사업추진 및 마무리                         : 2023.  7. ~ 11월

❍ 정산 및 사후관리                           : 2023. 12월

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(과수특작담당)
추진진도(%)	25%

55

고소득 작물 스마트 4차산업 지원

○ 고소득 작물 자동제어 시설장비 설치로 노동력 절감

○ 작물재배 환경 모니터링 및 생육상황 원격감시로 경쟁력 확보

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12월(4년간)

❍ 총 소요예산 : 금400백만원(국비20% 도비9% 군비21% 자담50%)

❍ 사업내용

- ICT제어를 위한 통신시스템, 센서 설치 및 CCTV 설치

- 온 ․ 습도 정보 취합 및 생육환경 조성을 위한 제어시스템 설치

□ 추진사항

❍ 보조사업자 신청 공모 및 접수             : 2023. 12. ~ 2024. 1월

□ 문제점 및 대책

❍ 단동 하우스는 센서 등 스마트팜 설치비 과다로 효율성 저하가 예상되므로 사업 진행시 유의사항 안내

❍ 스마트팜 홍보, 수요조사 및 대상자 선정 후 단년도 사업 마무리

□ 향후 추진계획

❍ 사업신청자 현지 확인 및 산학협동심의회 개최   : 2024. 1. ~  2월

❍ 사업대상자 선정 및 보조금교부신청 접수        : 2024. 2. ~  3월

❍ 보조금 교부결정 후 사업추진 및 마무리         : 2024. 3. ~ 12월

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(농업육성담당)
추진진도(%)	30%

56

스마트팜 청년창업 교육 시설 운영

○ 스마트팜 전문교육, 국내외 현장교육 추진, 정예 청년 농업인력 육성

○ 스마트팜 및 정밀농업 신속 보급으로 안정된 소득창출 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 농업기술센터 일원 및 현지

- 미래생명관, 시설하우스 실습교육장(3,420㎡), 스마트팜 관련 교육장

❍ 총 소요예산 : 금200백만원(군비, 매년 50백만원)

❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 2026. 12월(4년간)

❍ 사업내용 : 스마트팜 청년창업 교육 운영(제1기~제4기)

- 대    상 : 시설원예작물등 농업인 13명

- 기    간 : 2023. 6. ~ 2026. 11월(매년 5개월)

- 회    수 : 15회, 120시간(년간)

- 주요내용 : 기초(전기전자), 심화(작물 양수분관리, 복합환경제어),

실습(부품조립), 연수(국내외현장견학 등)

□ 추진사항

❍ 예산확보                                      : 2022. 12월

❍ 계획수립 및 교육생선발                        : 2023.  5월

❍ 개강식 및 오리엔테이션                        : 2023.  6월

□ 문제점 및 대책

❍ 스마트팜 국외현장교육 추진위한 민간인국외연수비 교육생 인원 추가예산 확보 필요 : 5명, 20,000천원 → 10명, 40,000천원(매년)

□ 향후 추진계획

❍ 평가 및 1기 졸업식                           : 2023. 11월

❍ 사업추진 및 졸업생 대상 연구회운영           : 2023. 12. ~ 2026년

구 분	공약사업
담당부서	농식품유통과(먹거리담당)
추진진도(%)	35%

57

산청군 먹거리통합지원센터 건립

○ 지역 선순환 먹거리 구축·확대를 위한 먹거리통합지원센터 건립

○ 학교급식 등 지역 먹거리 소비 촉진 및 농가 소득 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 병정리 326-6번지 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2024년

❍ 총 소요예산 : 금3,000백만원(도비 1,950, 군비 1,050)

❍ 사 업 량 : 지상1층 700㎡

❍ 사업내용 : 먹거리통합지원센터 건립(선별포장장, 물류피킹장, 전처리장 등)

□ 추진사항

❍ 산청군 푸드플랜 수립연구용역 실시                : 2021. 2. ~ 9월

❍ 산청군 푸드플랜 및 먹거리통합지원센터 건립 계획 수립  : 2022. 3월

❍ 먹거리통합지원센터 공유재산 관리계획 수립             : 2022. 6월

❍ 먹거리통합지원센터 건립 지방재정투자심사              : 2022. 8월

❍ 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역          : 2022. 10. ~ 2023. 2월

❍ 건축기획용역                                     : 2023. 4. ~ 6월

❍ 먹거리통합지원센터 공공건축 심의                        : 2023.  6월

❍ 먹거리통합지원센터 실시설계 용역                : 2023. 8. ~ 10월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 먹거리통합지원센터 착공                    : 2023. 11월

❍ 먹거리통합지원센터 준공예정                : 2024.  8월